문서번호	녹지관리과-3188
결재일자	2016.7.26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

						시 민
주무관		녹지관리과장		공원부장
이재호		문경재		전결 07/26 문길동
협 조

잠원한강공원 농구장 우레탄포장 납품기한 연기 검토보고

2016. 7.

한강사업본부

(녹지관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□	정보공개법 제9조 제1항 제5호 및 제6호

잠원한강공원 농구장 우레탄포장 납품기한 연기 검토보고

잠원한강공원 내 농구장 우레탄 포장 탈락현상으로 인한 정비를 위해 계약 중에 있는 우레탄포장 관급자재에 대해 다음과 같이 납품기한 연기사유가 발생하여 납품기한을 연기하여 사업시행에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		사 업 현 황

사 업 명 : 잠원한강공원 농구장 포장 보수 조달구매

위    치 : 잠원한강공원 농구장(강남나들목 앞)

사업기간 : 2016. 6. 28 ~ 2016. 7. 28

사업내용 : 우레탄포장(8종, t7mm) 456㎡

철거 : 연간단가

포장 : 관급자재

소요예산 : 25,080천원(조달수수료 123천원 별도)

Ⅱ		검 토 내 용

준공기한 연기사유

기존 농구장에 대한 부분 보수로써 철거 후 3일 이상의 건조기간이 요구되나 최근 장마철로 인한 간헐적 우천으로 건조기간 미확보

철거 후 포장이 즉시 이행되지 않을 경우 민원발생 및 시민불편이 예상되는 바, 철거․건조․시공의 공백 최소화 필요

준공기한 연기

당초 : 2016. 6. 28 ~ 2016. 7. 28

변경 : 2016. 6. 28 ~ 2016. 8. 19(22일 연장)

연기사유 귀책소재 : 발주처

배상지연금 부과여부 : 미부과

참고자료 : 7월 우천현황(기상청)

Ⅲ		검 토 의 견

관급자재 계약 건에 대해 사전절차(철거)가 선행되어야 하는 바, 납품기한 연기사유가 부득이하게 발생

기상상황에 따라 건조기간 및 주말이용에 불편을 주지 않도록 사업을 시행하여 사업시행에 만전을 기하고자 함

붙임 : 사업시행 방침서 1부.