문서번호	시설과-2882
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
신재현	오재영	임병국	07/26 代문근식
협 조

월드컵공원 휀스 개방 공사 2차 설계변경 보고

월드컵 공원 휀스 개방 공사 2차 설계변경 보고

2016. 7.

서부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

월드컵 공원 휀스 개방 공사 2차 설계변경 보고

월드컵공원 휀스 개방공사에 대하여 초화류 물량 변경 등 설계변경

하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 월드컵공원 휀스 개방공사

○ 도 급 비 : 15,637천원

○ 도 급 자 : ㈜ 신흥체육건설 대표 이종호

○ 공사기간 : 2016. 5.30. ~ 7.27.

○ 공사내용 : 휀스철거, 초화류 식재

□ 주요 변경 내용  (세부내용 별첨 참조)

○ 설계 변경

- 평화의공원 입구 주변 토사유실 방지를 위한 식재 (산철쭉)

- 난지천공원 입구 주변 장미 제거로 기둥 설치 불필요

※ 도급 금액 변경 없음

□ 예산확보방안

○ 증액 없음

□ 행정사항

○ 설계변경 시행하고자 함.

따로붙임 : 설계변경 내용.  끝.