투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기요청(잠원한강공원 농구장 체육시설탄성포장재 조달구매)

1. 녹지관리과-2607(2016.6.24.)호와 관련입니다.

2. “잠원한강공원 농구장 체육시설탄성포장재 조달구매” 시행 관련 관급자재 납품기한 연기를 아래와 같이 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 납품기한 요청 목록

납품요구번호	물품명 (식별번호)	단위	수량	납품기한		비고
				당초	변경
****************	********* **********	㎡	***	2016.7.28	2016.8.19

나. 변경사유 : 기존 포장에 대한 철거 및 건조기간이 요구되나 장마철로 인한 우천으로 건조기간 미확보로 장마철 이후 납품가능. 끝.

	녹지관리과장
주무관	이재호		녹지관리과장	07/26 문경재
협조자
시행	녹지관리과-3187	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0836	/전송	02-3780-0745	/		/	부분공개(5)