투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	롯데건설(주) 대표이사
(경유)	잠실사거리 지하광장 조성공사 현장대리인 장지영
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 변경 승인관련 보완 (잠실사거리 지하광장 조성공사)

1.  롯건지하광장 제2014-62호(‘14.2.12)와 관련입니다.

2. 귀사에서 공사중인 『잠실사거리 지하광장조성공사』의 교통안전시설물 원인자부담공사에 대한 공사기간 연장승인 요청과 관련 교통안전시설공사 변경물량, 시공업체(설계, 감리, 시공사) 변경사항 등을 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
★주무관	유현선		주무관	박일연		도로보수과장	02/17 손수희
협조자
시행	도로보수과-1017	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개