투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(소)위원회 자문 의뢰(서울역고가 바닥판 철거공사)

우리부에서 시행 중인 『서울역고가 바닥판 철거공사』에 대한 설계변경(소)위원회 자문을 아래와 같이 요청코자 합니다.

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 서울역고가 바닥판 철거공사

나. 규    모 :

- 본선 바닥판 철거 : 연장 516.5m

- 램프B 철거 : 연장 136m, 램프D 철거 : 연장 92m

다. 공사기간 : 2015.11.18. ~ 2016. 8.30.

라. 시 공 사 : 성도건설산업(주)

마. 감 리 사 : ㈜진우엔지니어링코리아 외 3개사

2. 설계변경소위원회 자문요청 내용

연번	자문안건	증·감액	비고
1	낙하물방지비계의 방수막 및 수직비계 추가 설치	증 54,307천원
2	낙하물방지비계 해체비 반영	증 215,519천원

붙임 : 설계변경 소위원회 자문 요청서  2부.  끝.

주무관	박웅교		토목총괄과장	이동훈		토목부장	07/26 김영수
협조자	주무관	이상근		주무관	남덕희
시행	토목부-15445	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2546	/전송	3708-2599	/	pkyo2425@seoul.go.kr	/	대시민공개