투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	가재울뉴타운 4구역 주택재개발정비사업조합 귀하
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 준공기한 연기승인 알림[서대문구 가재울뉴타운 4구역(추가) 주변]

1. 가재울4조합 2016-335(2016.07.27.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 귀 조합에서 시행 중인 『교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사[서대문구 가재울뉴타운 4구역(추가) 주변]』와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기승인하고 알려드리니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사

나. 공사장소 : 서대문구 가재울뉴타운 4구 주택재개발 주변

다. 원 인 자 : 가재울뉴타운 4구역 주택재개발정비사업조합

라. 준공기한 연기승인내역

- 당 초 : 2016.06.23.~2016.07.31.

- 변 경 : 2016.06.23.~2016.09.30.

※ 교통안전시설정보(T-GIS)에 시설물정보 입력 후 준공 요청

마. 연기사유 : 토목공정 지연으로 인한 공기부족.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
전문관	김진종		기전과장	07/27 양영민
협조자
시행	기전과-8205	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 (상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8395	/전송	02-300-8410	/	jeanjong@seoul.go.kr	/	대시민공개