준공기한 연기 보고서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	조은희	代김승완	07/27 代김찬모

	명에 의하여 『2016년 서강동외 7개동 상수도공사』시행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.
2016. 7. 27.
보 고 자 : 직 지방시설서기보 성명 : 조은희

복 명 내 용
건 명	준공기한 연기 보고서(*********)
내용	1. 공사 위치 : 서울시 마포구 ***** 2. 작업지시 번호 : 개량-62 3. 급수공사 종별 : 단절관 정비 4. 보고 내용 - 상기 위치에 급수공사를 작업지시하였으나, 단수가 수반되는 작업으로 상가 영업점과 일정조정 후 연기하고자 함. 5. 조치의견 - 상기 위치의 급수공사 준공기한을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다. ◆ 당초 공사기간 : 2016. 7. 6. ～ 2016. 7. 27. 변경 공사기간 : 2016. 7. 6. ～ 2016. 8. 5. 6. 지체상금 부과여부 : 미부과
비 고

끝.