투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계변경(1차 내역변경 및 총차 공기연장) 계약의뢰(서울 재사용플라자 건립 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인 「서울재사용플라자 건립 전기공사』 와 관련, 아래와 같이 설계변경 계약의뢰(1차 내역 변경 및 총차 공기연장)하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 서울 재사용플라자 건립 전기공사

2. 공사금액 : 금2,203,378,690원(1차 426,041,390원)

3. 시 공 사 : ㈜다부전설외 1개사

4. 공사기간 : ‘15.06.15 ~ ’17.01.17.(1차 : ~‘16.07.31)

5. 공사금액 변경 현황

(단위:원)

구 분	당 초		변 경		증‧감		비고
	금액	기간	금액	기간	금액	기간
총 차	2,203,378,690	‘15.06.15~’17.01.17	2,203,378,690	‘15.06.15~’17.03.15	0	증57일
1 차	426,041,390	‘15.06.15~’17.07.31	426,041,390	‘15.06.15~’17.07.31	0	0	내역변경

6. 변경사유 : 건축 공기연장에 따른 전기공사 공사기간연장 및 현장여건을 반영한 차수간 내역변경

따로붙임 : 1. 설계변경 시행 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	유병기		설비부장	07/19 권오식
협조자	계약1팀장	조현
시행	설비부-11457	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(5)