문서번호	토목부-14900
결재일자	2016.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
윤효진		진재섭	07/19 김영수
협조
	주무관		박상철

가설건물 이설계획 검토보고

(남부순환로 개봉1동사거리주변 평탄화공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

가설건물 이설계획 검토 보고

『남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사』시행 중 저촉되는 한국신체장애인복지회 가설건물(창고 및 이동식화장실) 이설계획 검토보고임.

※ 남부감 제2016-052호(2016. 7.14.) : 한국신체장애인복지회 가설창고 이설 현황보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화 공사

○ 공사기간 : ’16.03.25.∼’19.03.24.

○ 규    모 :

- 도로구조 개선 : 폭 30m(6차로), 연장 1.1km

- 교량 확장 : 폭 22m→31.4m, 연장 32.3m→38.0m

○ 총사업비 : 31,000백만원

○ 시공사 및 용역사 : ㈜삼일기업공사외 1개사 / ㈜동일기술공사외 2개사

□ 검토현황

○ 구로구청 사회복지과 및 사)한국신체장애인복지회에서 창고 및이동식화장실 이동 적의처리 요청에 의거 가설건물 이설에 대하여 적정성을 검토하고자 함.

- 관련공문 : 구로구청 사회복지과-16980(2016. 6. 1.)호

○ 추진경위

- 2016. 6. 1. : 거주자 우선주차장 등 이설관련 협조요청

- 2016. 6. 13. : 신체장애인협회(구로지부)에서 가설 창고 조치계획 협의

○ 가설창고 이설 및 화장실 이동 계획 현황

공종	규격	단위	수량	비고
가설창고 설치	1개동	㎡	29
기존창고 철거	1개동	㎡	20
출입문 설치	1개소	개소	1	이전설치
출입문 철거	1개소	개소	1
방수몰탈 처리	방수시멘트	식	1	가설창고 하부

□ 개략공사비 검토

공종	견적금액(그린유리)	비고
가설창고 이설	6,200,000원	신축 가설창고 및 메쉬휀스 이동설치등 1식
협의율 적용	5,579,000원	강제협의율 적용 (설계가 100% + 낙찰율 79.998%) / 2 = 89.999%

□ 감리단 검토의견

○ 공사시행중 시점부 좌측 공용주차장내에 한국신체장애인복지회(구로지부)에서 곰두리 무료급식소를 운영하고 있으나 급식소의 가설창고와 화장실이 공사부지 내에 있어 해당 가설건물은 이설함이 타당하다고 사료되며,

○ 구로구청 사회복지과 이설요청에 따라 복지회의 이설요청 위치로 우선시공하여 시점부 공사를 조속히 시행함이 적정하다고 판단되며, 추후 상세공사비를 산정하여 실정보고 예정임.

□ 조치의견

○ 상기 감리단 검토의견과 같이 승인하고 추후 설계변경시 정산 처리함이 타당하다고 사료됨.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.