투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기요청(세운상가 활성화_냉난방설비 구매)

우리 부에서 시행중인『세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 기계설비공사』에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 기계설비공사_냉난방설비 구매

나. 납품기한 연기요청 내용

(조달수수료 포함금액임)

납품요구번호	품 명	계약금액	계약업체	계약일자	납품기한
					당 초	변 경
12-16-2-16148-00	냉난방설비	57,824,960	엘지전자주식회사	‘16.04.04	′16.07.30	‘17.05.31
12-16-2-16149-00	냉난방설비	13,321,990

다. 연기사유 : 선행공정 지연으로 인한 설치시기 미도래

라. 계약금액 및 수량 : 변경없음

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 합의서 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	이호완		건축설비과장	김영수		설비부장	07/20 권오식
협조자
시행	설비부-11542	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96) 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	lee5858@seoul.go.kr	/	대시민공개