문서번호	정수과-2490
결재일자	2016.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
임태섭		김형섭	07/20 박기석
협조
	정수시설과장		김긍채

「2016년 정수처리시설 청소용역」

상반기 정수시설 청소 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

강북아리수정수센터

( 정 수 과 )

「2016년 정수처리시설 청소용역」

상반기 정수시설 청소 완료 보고

우리 정수센터에서 시행 중인 『2016년 정수처리시설 청소용역』 추진 관련하여 상반기 청소를 완료하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추진근거

정수처리시설 청소용역 시행계획(정수과-428, 2016.02.05.)

2016년 상반기 정수시설 청소 추진계획(정수과-926, 2016.03.18.)

Ⅱ		용역개요

용 역 명 : 2016년 정수처리시설 청소용역

용역업체 : 미래종합관리(대표자 권금옥)

용역기간 : 2016.03.14. ~ 2016.12.20.

용 역 비 : 금174,494,750원

청소물량

□ 주벽청소 232,678㎡, 정수지 청소 31,753㎡, 슬러지 청소 5,120㎥, 상징수 이송 2회

청소횟수

□ 년 1회 : 정수지, 활성탄흡착지

□ 년 2회 : 응집․침전지(웨어 및 수로 포함), 여과지, 배출수처리장

□ 년 2회 : 응집지 침전슬러지 및 배출수 처리장 농축슬러지 제거

Ⅲ		추진결과

상반기 청소결과 : 연간 공정율 대비 48% 청소 완료

청소대상(1차 작업지시 내용)

□ 1차 용역기간 : 2016.03.28. ~ 2016.07.15.

□ 작업지시 내역

- 주벽 청소(응집․침전지, 여과지, 활성탄흡착지, 배출수처리장) : 112,341㎡

- 침전슬러지 청소(응집지) : 726㎥, 농축슬러지 청소(배출수처리장) : 1,765㎥

- 농축조 상징수 이송(4지) : 1회

청소완료 현황

□ 공정별 청소완료 내용

- 응집지 1회 : 총24지 중 20지 청소완료(주벽․패들․수로 청소, 바닥 퇴적물 제거)

- 침전지 1회 : 총24지 중 20지 청소완료(주벽, 바닥, 웨어 및 수로 청소)

- 여과지 1회 : 총56지 청소완료(주벽, 유입수로, 중앙수로)

- 활성탄흡착지 1회 : 총36지 청소완료(주벽, 유입수로)

- 배출수처리시설 1회

▸배출수지(4지), 배슬러지지(2지), 회수조(2지), 1․2차 농축조(각 2지) 청소완료

□ 청소완료 세부내역

구 분		단위	작 업 물 량(1차)			비고 (증감사유)
공종	구조물구분		지시	준공	증감
주벽	침 전 지	㎡	49,105	49,105	-	지시물량과 동일하게 준공
	침전지웨어	㎡	7,172	7,172	-
	침전지수로	㎡	2,185	2,185	-
	여 과 지	㎡	10,287	10,287	-
	응 집 지	㎡	23,646	23,646	-
	배출수지	㎡	3,536	3,536	-
	배슬러지지	㎡	1,323	1,323	-
	회 수 조	㎡	1,494	1,494	-
	1차 농축조	㎡	3,485	3,485	-
	2차 농축조	㎡	1,271	1,271	-
	활성탄흡착지	㎡	8,838	8,838	-
	소 계	㎡	112,341	112,341	0
응집지 (침전 슬러지)	유입수로	㎥	35	35	-
	응 집 지	㎥	691	691	-
	소 계	㎥	56,277	56,277	0
농축 슬러지	배출수지	㎥	142	142	-
	배슬러지지	㎥	378	378	-
	1차 농축조	㎥	1,025	1,025	-
	2차 농축조	㎥	220	220	-
	소 계	㎥	1,765	1,765	0
상징수 이송	농축조(4지)	회	1	1	-

Ⅳ		행정사항

2016년 상반기 정수시설 청소 완료

□ 1차 작업지시서에 따라 주벽 및 슬러지 청소 실시

□ 당초 작업지시 물량에 대하여 청소 완료하였기에 정산 및 1차 준공처리

2016년 하반기 정수시설 청소 추진 ☞ 【별도 계획 수립】

□ 하절기 장마 종료 후 전체 공정에 대하여 2차 작업지시 및 청소 실시

- 응집․침전지(24지), 여과지(56지), 정수지(4지), 배출수지(4지), 배슬러지지(2지), 회수조(2지), 1차 농축조(2지), 2차 농축조(2지)

붙임 : 1. 상반기 청소현황 1부.

2. 2016. 1차 완료내역서 1부.

2. 청소완료 사진자료 1부.  끝.