문서번호	도시철도토목부-9293
결재일자	2016.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		윤방식	07/20 김진팔
협 조
	공사지원과장			김창기
	시설전기과장			代김지운
	설비공사과장			황영일
	주무관			김용선

『지하철 9호선 923공구 건설공사』

6차(3회)공사 물량 조정 검토 보고

2016. 07

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『9호선3단계 923공구 건설공사』

6차(3회) 공사 물량 조정 검토 보고

『지하철9호선 3단계 923공구 건설공사』와 관련 책임감리원으로부터 6차공사에 대한 물량 조정 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임. ※ ㈜동명기술공단 동기공 제2016-2827(‘16.7.14)

1		사업 개요

○ 공 사 명 : 지하철9호선 3단계 923공구 건설공사

○ 공사개요 : 연장1,782m

(본선1,168m, 터널410m, 정거장1개소 204m)

○ 공 사 비 : 100,968백만원(6차 : 10,460백만원)

○ 공사기간 : ‘10.09.20 ~ ‘16.12.31

(6차 : ‘15.07.21 ~ ‘16.07.20)

○ 시공회사 : 대림산업(주) 외 5개사

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 3개사

2		추진 경위

○ ‘15.06.24 : 외부출입구 #1 길이축소 승인 요청(감리단→본부)

○ ‘15.07.17 : 외부출입구 #1 길이축소 승인 요청(본부→감리단)

○ ‘16.02.05 : 외부출입구 #1 흙막이 벽체 변경 회신(감리단→시공사)

○ ‘16.04.07 : 외부EV #2 위치변경 승인 요청(감리단→본부)

○ ‘16.04.25 : 외부EV #2 위치변경 승인 통보(본부→감리단)

○ ‘16.07.14 : 6차공사 물량 조정 요청(감리단→본부)

3		보고 내용

□ 6차공사 물량 조정 현황

구 분		당 초	변 경	비 고
토목분야	938 정거장	- 외부출입구#1 규모 ․L=52.45m	- 외부출입구#1 규모 ․규모조정 : L=38.05m
		- 외부출입구#1 흙막이 벽체 ․H파일+토류판	-	기존CIP 가시설 이용
		- 외부엘리베이터#2 ․E/V형식 : 일반형	- 외부엘리베이터#2 ․E/V형식 : 관통형 ․위치조정 : L=10m
		-	복구공사 ․복공판 해체 (L=25m, V=120㎡)
	본선 2구간	-	토공 ․되메우기 (L=40m, V=2,327㎥)
기타분야	전기 공사	전력간선설비공사1식 ․접지용전선 외 본선터널 전등전열 설비공사1식 ․본선터널조명 ․애자 및 앵커설치	전력간선설비공사1식 ․접지용전선 외 본선터널 전등전열 설비공사1식 ․애자 및 앵커설치
	기계 공사	-	- 공조덕트설치공사 1식 ․공조배관, 갈바륨덕트 제작설치
	소방 공사	- 소화설비공사 1식 ․옥내소화, 연결송수 배관	-
기 타		-	공사손해보험 1식

□ 6차공사 수량 변경 현황

(단위 : 백만원)

구 간		공 종			단위	당 초		변 경		증 감
						수량	금액	수량	금액
본선 개착		토 공		토공굴착	㎥	10,099	2,198	10,099	2,221	증 23
				되메우기	㎥	20,839		23,166
		흙막이공		버팀보	본	140		140
		구조물		콘크리트	㎥	3,380		3,380
		포장공		연 장	m	660		660
		부대공			식	1		1
938정거장		토 공		굴 착	㎥	7,568	2,742	5,413	2,672	감 70
		흙막이공		버팀보	본	244		207
		구조물		콘크리트	㎥	9,929		9,929
본 선 환기구	937S2	구조물		콘크리트	㎥	364	164	364	164	-
	937E2	가시설		버팀해체	본	79	271	79	271	-
		구조물		콘크리트	㎥	1,089		1,089
	938E1	가시설		버팀해체	본	60	86	60	86	-
		구조물		콘크리트	㎥	32		32
	938S1	토공		토 공	㎥	13,965	831	13,965	831	-
		흙막이공		H-PILE	본	89		89
				복공판	㎡	1,017		1,017
				버팀보	본	126		126
		구조물		콘크리트	㎥	-		-
본선터널		구조물		매입전	조	-	0	-	0	-
가 설 공							455		455
계측 및 품질시험비							126		126
건 축							6		6
전 기							143		70	감 73
기 계							170		325	증 155
소 방							75		0	감 75
직접공사비(계)(①)							7,267		7,227	감 40
간접공사비(②)							2,268		2,277	증 9
공사손해보험(③)							-		31	증 31
물가변동			1회				294		294
			2회				338		338
			3회				293		293
			계(④)				925		925	-
총공사비(①+②+③)							10,460		10,460	-

□ 6차공사 물량 조정 사유

○ 938정거장 외부출입구#1 규모조정

- 938정거장과 일자산을 횡단하는 기존 보도육교에 대하여 GB관리계획 협의과정에서 원상복구시 미설치토록 협의됨에 따라 출입구#1 길이축소 요인 발생(당초 : L=52.45m → 변경 : L=38.05m)

※ 보도육교 미복구 계획 및 외부출입구(#1) 규모조정 검토보고

[도시철도토목부-8958(‘15.07.16)]

당 초	변 경

○ 938정거장 외부출입구#1 흙막이 벽체 변경

- 외부출입구#1 우측에 보훈병원 장례식장 공사시 시공한 CIP(∅400, C.T.C400)벽체가 측면 파일 위치에 존치하고 있어 안정성 검토 후 출입구 측면 벽체로 이용하여 금회 시공제외(H-Pile+토류판, L=16m)

○ 938정거장 외부엘리베이터#2 위치변경

- 보훈병원 내의 녹지대에 설치토록 계획되었던 외부EV(#2)는 액화 산소탱크 옆에 위치하여 이용 불편과 보훈병원 내부 도로 급구배(S=9.2%)에 따른 안전사고 발생이 우려되며,

- E/V 이용을 위해서는 보훈병원 부지를 점용하여 별도 보도조성 및 액화 산소탱크 이설 등 요구되어 위치 변경(L=10m)이 필요함.

※ 정거장 외부E/V 위치변경 검토보고

[도시철도토목부-4930(‘16.04.20)]

당 초	변 경

○ 6공사 물량 조정에 따른 기계분야 공조배관 제작, 본선구간 되메우기, 938정거장 구간 복공철거 시공물량 및 공사손해보험 반영

4		책임감리원 검토의견

○ 6차공사 물량 조정에 대하여 검토한 결과

․938정거장 외부출입구#1의 규모 축소 및 흙막이 공법 변경(H-파일+토류판⇒CIP)

․938정거장 엘리베이터#2 위치 조정에 따른 물량 감소

․전기 및 소방공사 물량 감소

○ 따라서, 기계분야 공조배관 제작설치, 본선구간 되메우기, 938정거장 구간 복공철거를 추가로 시공하여 6차공사 전체금액 변경없이 물량을 조정하여 변경 계약함이 적정하다고 판단됨.

5		조치 계획

○ 책임감리원 검토의견과 같이 6차공사에 대해 전체금액 변경없이 물량 조정하여 설계변경 처리코자 함.

붙 임 : 감리검토 의견서 1부.  끝.