문서번호	방재시설부-11321
결재일자	2016.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
김상용		조성만	07/20 임춘근
협조
	★주무관		김도형

마곡지구내 재생수공급시설 설치공사

재이용수 공급관로 부설 검토 보고

2016. 7

도시기반시설본부

(방재시설부)

마곡지구내 재생수공급시설 설치공사

재이용수 공급관로 부설 검토 보고

「마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사」와 관련하여 재이용수 활용방안으로 서남물재생센터內 생태연못 및 홍보견학코스에 재이용수 공급에 따른 공급관로 부설공사비(토목사항)에 대한 검토 보고 임.

관련근거

○ 도화(서남마곡) 2016-182호(‘16.06.24)『실정보고(서남물재생센터내 공원 재이용수 공급관로 부설)』

공사개요

○ 위    치 : 서울시 강서구 양천로 201 (마곡동, 서남물재생센터)

○ 규    모 : 재생수 생산시설 Q=20,000㎥/일 (1단계 : 3,000㎥/일)

○ 사업기간 : 2011. 11. 01 ∼ 2016. 07. 31

○ 도 급 비 : 7,361백만원

○ 시 공 사 : 유호산업개발(주)

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링, ㈜유신

실정보고 내용

○ 관련근거

- 관련공문 : 물순환정책-2177호(2016.02.05)『마곡지구내 재생수 공급시기 조정에 따른 협조(조치) 요청

- 관련내용 : 재이용수 활용방안으로 서남환경내 생태연못(530㎥/일) 및 홍보견학코스(440㎥/일)에 재생수 공급에 따른 관로부설 등 제반 조치

○ 변경내용

1) 서남물재생센터공원 생태연못 (530톤/일)

- 재생수 공급시설 옥외에 설치된 조경용수 배관에서 분기하여 재이용수 공급

- 관로직경(STS 304) D65㎜, 연장 270m

2) 홍보견학코스 공급(440톤/일)

- 재생수공급시설에서 기존 장내용수 공급동(급수동)까지는 기 설치된 퇴수배관을 이용하고,

- 급수동 저류조에 수중펌프를 설치하여 홍보견학코스 연못까지 관로를 추가 부설하여 재생수 공급

- 관로직경은(STS 304) D50㎜, 연장 129m

- 운전은 급수동에서 전원공급 받아 전기판넬(LOP)에서 타이머 및 수동운전 실시

○ 관로부설 도면

2

1

구분	위 치	연 장	재 질	유 량	비 고
①	생태연못	d65*270m	STS304	530톤/일
②	홍보견학코스	d50*129m	STS304	440톤/일	수중펌프설치

○ 세부내역

분야	품 명	규격		단위	수량	금 액(원) (직접공사비)	비고
		1구역	2구역
합 계						58,480,310
기계	소 계					40,873,737
	기자재비		수중펌프 및 판넬 0.28㎥/일*20m*1.5Kw	식	1	8,712,150	수중펌프, 판넬 전선관 및 설치
	기자재설치		펌프 및 판넬배선	대	1	221,042	전기실앞 저수조에 설치
	배관자재	D65 * 270m (할증296m)	D50 * 129m (할증142m)	M	399 (438)	9,920,231	홍보, 생태 2곳
	배관설치	"	"	M	438	21,089,851	“
	부대공사	ㄷ형강외		Kg	159	930,463	펌프배관 옥외설치
토목	소 계					17,606,573
	토공	터파기:280㎥(265m)	터파기:120㎥(116m)	㎥	400	3,882,370	동결깊이준수
	포장공	포장절단 12m외		m	12	792,794	도로관통 절단부포장
	부대공	가림막:20	가림막:20	경간	40	6,500,432	아파트 후면설치
	조경공사	잔디:543	잔디:180	㎡	723	4,596,834
	기타(모래)	모래:20	모래:8	㎥	28	1,834,143

○ 공사비(토목분야) 변경내역

(단위 : 원)

공 종	수 량	공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증ㆍ감
1. 직접공사비		-	17,606,573	17,606,573
토공		-	3,882,370	3,882,370
포장공		-	792,794	792,794	신규단가 협의율(90.375%)적용
부대공			6,500,432	6,500,432
조경공사			4,596,834	4,596,834
사급자재			1,834,143	1,834,143
2. 제 경 비		-		7,733,427
3. 도급공사비		-		25,340,000

검토 및 조치계획

○ 본 실정보고는 재이용수 활용방안으로 서남환경내 생태연못 및 홍보견학코스에 재생수 공급방침에 따른 관로부설공사(토목분야)에 대한 공사비 검토 실정보고로서,

○ 재이용수 공급방법, 수량, 단가적용 등 책임감리원의 검토의견이 적절하다고 판단되므로 감리단 실정보고 사항을 승인코자 함.

붙임 : 1) 책임감리원 검토의견서 1부.

2) 물순환정책과-2177호(2016.02.05) 공문 1부

3) 협의율 관련 공문 1부. 끝.