정산보고서

- 여과지동 외부 재도장공사 -

주무관	주무관	정수시설과장		결재
이상훈	김동우	07/28 김긍채
협 조

문서번호 :	정수시설과-2299

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 여과지동 외부 재도장공사

나. 계약금액 : 167,838,000원

다. 계약업체 : 광동기업주식회사 대표 홍종옥

라. 공사기간 : 2016. 4. 25 ~ 8. 22

2. 보고사항

가. 국민건강.연금보험료 정산

- 수급업체가 준공계 제출시 ‘국민건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료’ 납부 영수증을 제출하지 않았으며, “상기 보험에 가입하지 않았음”을 수급업체 담당자로부터 확인

산업안전보건관리비 항목별 사용내역 기준에 따른 정산

산업안전보건관리비	사용신청 내역 (원)		인정 내역 (원)		감 액 (원)	비고
계	개수	3,420,000	개수	1,675,000	▼ 2,035,000
위험물 저장소	1	800,000	0	0	▼ -800,000
안전화	20	1,200,000	10	600,000	▼ -600,000
안전모	20	200,000	10	100,000	▼ -100,000
각반	40	120,000	10	30,000	▼ -90,000
안전밸트	7	525,000	7	525,000	-
분진마스크	10	320,000	10	320,000	▼ -320,000
소화기	5	125,000	0	0	▼ -125,000
안전조끼	13	130,000	10	100,000	▼ -30,000

- 국민건강·연금보험료, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비 정산·감액 현황

계약금액	감 액	정산준공금액
167,838,000원	▼6,810,000원	161,028,000원

3. 보고자 조치의견

○ 준공검사 결과 설계서 및 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었으나

○ 상기 보고사항과 같이 ‘국민건강·연금보험료, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비’에 대하여 계약금액을 정산·감액하여 지출하도록 통보하고자 합니다.

붙임문서 : 정산내역서 1부.  끝.