투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(조경과장)
(경유)
제 목	강서도서관 옥상녹화·텃밭조성사업관련 예산 추가 요청

1. 조경과-1062(2016.1.26.)호 및 10199호(2016.7.15.)와 관련입니다.

2. 강서도서관 옥상녹화·텃밭조성사업과 추진과 관련하여 실시설계용역 중 현황측량결과 대상지면적 증가등으로 공사비가 부족하여 아래와 같이 예산을 추가 요청합니다.

가. 사 업 명 : 강서도서관 옥상녹화·텃밭조성사업

나. 예산 추가 요청 내역

사업대상지	건물명	소유	전 → 후		변경사유
			면적(㎡)	총사업비(천원)
강서구 등촌동 520-6	강서도서관	시	560 → 690 (증130)	196,000 → 235,000 (증39,000)	구조안전진단 실측결과 대상지 면적 증가 및 설계심의 결과 수용을 위한 공사비 부족

※ 산출근거 : 130㎡×300,000원(구조진단, 설계비제외) = 39,000천원

붙 임 : 구조안전진단 결과 1부.   끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	배소윤		조경시설팀장	이용원		시설과장	전결 07/28 임병국
협조자
시행	시설과-2911	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	300-5535	/전송	300-5569	/	syhouse@seoul.go.kr	/	부분공개(6)