문서번호	도로시설과-2616
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		한강교량팀장	도로시설과장
전봉재		하현석	02/17 이용심
협조

2013년 한강교량 수중구조물

점검(청소)용역 설계변경(정산) 검토 보고

2014

도시안전실

(도로시설과)

2013년 한강교량 수중구조물

점검(청소)용역 설계변경(정산) 검토 보고

한강교량 수중구조물 점검(청소) 용역 시행중, 하상잔재물 조사 과업에

대한 물량 변경이 발생하여 실정 보고후 설계 변경을 시행코자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2013년 한강교량 수중구조물 점검(청소)용역

○ 대    상 : 동작대교외 4개 교량(237기) 및 하상잔재물 조사(3개교량)

○ 용역기간 : 2013. 05. 28 ~ 2013. 12. 20

○ 용 역 비 : 348,533,100원

○ 수급업체 : (주)합동건설  대표 김춘옥

□ 추진사항

○ 2013. 4. 15 : 용역 발주

○ 2013. 5. 30 : 용역 착수

○ 2013.10.25. : 1~3차 작업완료

※ 8. 12 : 지속된 장마로 인한 점검율 만회대책 보고

○ 2013.12.13. : 4차 작업 완료(아차산교)

○ 2014. 2.10  : 5차 작업 완료(하상잔재물 조사)

□ 보고사항

○ 하상잔재물 잠수부 확인 물량 축소

- 수중음파탐지기(Side Scan Sonar)로 1차 조사 후, 잔재물 의심 지점에 잠수부를 투입하여 육안으로 직접 조사 및 수중 카메라 촬영

- 물량 변경 사항

구 분		당초	변경	증·감		비고
				수량	금액(천원)
계		120	87	감) 33	감) 2,135
잠수부 확인	천호대교	40	37	감) 3	감) 192
	반포대교	40	20	감) 20	감) 1303
	성산대교	40	30	감) 10	감) 640

□ 보고자 의견

○ 변경된 물량으로 설계 변경을 시행하여, 정산처리코자 함.

첨부 : 설계 변경 내역서 1부. 끝.