문서번호	도로시설과-2614
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	한강교량팀장	도로시설과장
권세봉	하현석	02/17 이용심

- 한강교량 일상유지보수공사 -

전면책임감리용역 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				996,600천원

2014.  2.

도시안전실

(도로시설과)

- 한강교량 일상유지보수공사 –

전면책임감리용역 설계변경 검토 보고

한강교량 일상유지보수공사 전면책임감리 용역의 보조감리원 추가 투입과 직접경비 조정으로 인한 감액 사유가 발생하여 설계변경 시행코자함.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 한강교량 일상유지보수공사 전면책임감리

❍ 용역기간 : 2011. 4. 25 ~ 2014. 2. 28.(3년 장기계속계약)

❍ 용역금액 : 총괄 996,600천원(3차 384,600천원)

❍ 과업내용 : 한강교량(20개소) 일상유지보수공사 책임감리

❍ 용 역 사 : ㈜신성엔지니어링 정찬섭

□ 설계변경 내용

❍ 설계변경 사유

- 보조감리원 배치기간 조정(1개월 추가 투입) 및 직접경비 조정

※ 감리원 배치기간 연장 승인 : 도로시설과-22485(2013.12.24)

❍ 설계변경 내역 : “변경설계서 참조”

- 감리용역비 조정내용

구 분	당 초	변 경	증·감	변경사유
전 체	996,600천원	988,100천원	감) 8,500천원	보조감리원 1개월 추가 가설 사무실비용 삭감 인쇄비(한강백서) 추가
1차(`11년)	270,000천원	270,000천원	0
2차(`12년)	342,000천원	342,000천원	0
3차(`13년)	384,600천원	376,100천원	감) 8,500천원

- 감리원 투입 조정 현황

구 분	감리원	당 초	변 경	증·감	비 고
전 체	감 리 사	34.2/월	34.0/월	감) 0.2/월
	감 리 사 보	51.34/월	52.34/월	증) 1/월
	현지사무원	34.2/월	34.0/월	감) 0.2/월
3차(`13년)	감 리 사	12.4/월	12.2/월	감) 0.2/월
	감 리 사 보	20.0/월	21.0/월	증) 1/월
	현지사무원	12.4/월	12.2/월	감) 0.2/월

- 직접경비 조정 현황

구 분	감리원	당 초	변 경	증·감	사유
전 체	도 서 인 쇄 비	4,770,000	6,064,000	증) 1,294,000	백서발간
	가설사무실비	14,545,000	0	감) 14,545,000	미 사 용
3차(`13년)	도 서 인 쇄 비	1,722,500	3,016,500	증) 1,294,000	백서발간
	가설사무실비	14,545,000	0	감) 14,545,000	미 사 용

□ 조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 실제 발생된 보조감리원 1개월 추가투입 및 직접경비 물량을 설계 변경하여 준공 처리코자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서(전체) 1부.

2. 설계변경 내역서(3차) 1부.  끝.