문서번호	수처리연구과-5289
결재일자	2016.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이건수		장동우	07/28 최영준
협조

지체상금 미부과 사유

2016. 07. 28

수도연구부 수처리연구과

지체상금 미부과 사유

○ 공 사 명 : UV-AOP 도입 관련 고도실증플랜트 정비공사

○ 계 약 자 : 성진, 대표 김대운

(경기도 화성시 양감면 은행나무로 225)

○ 계약금액 : 5,445천원

○ 계약일자 : 2016. 6. 27.

○ 공사기간 : 2016. 6. 27 ~ 2016. 7. 27.

○ 지 체 일 : 1일

○ 미부과 사유

위 공사를 시행하면서 발생한 물품(장비)에 대해 유관부서에 사용계획을 조회하는데 4일(2016. 7. 22 ~ 7.26)이 소요되어 준공계 제출이 지체(1일)된 사항으로 발주부서에 귀책이 있는 바 지체상금을 미부과코자함.

2016. 7. 28.

수처리연구과     이 건 수