문서번호	기전과-6267
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	북부도로사업소장
백윤광		이영목	06/29 노영석
협조
	주무관		박정민

『2016년 교통신호기공사(연간단가-1․2구역․통합)』

추가배정예산 사용계획 보고

2016. 6

북부도로사업소

(기전과)

『2016년 교통신호기공사(연간단가-1․2구역․통합)』

추가배정예산 사용계획 보고

경찰청의 교통규제심의, 노후 신호기 정비 및 긴급출동 등 도로를 이용하는 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성코자 추진하고 있는 교통신호기 공사에 대해 추가예산이 배정되어 사용계획을 수립하고 이를 보고함.

□ 사업현황

○ 2016. 2. 16 교통분야(신호기) 공사추진 계획 보고

○ 2016. 3. 15 교통신호기공사(연간단가-1․2구역․통합) 착공

○ 2016. 3. 21 교통신호등주 관급자재(1구역) 착수

○ 2016. 4. 25 교통신호등주 관급자재(2구역) 착수

○ 2016. 6. 10 교통신호기분야 사업추진을 위한 추가 예산배정(교통운영과)

※ 추가배정액 : 702백만원(노후 신호등주 개선 목표 - 125개)

□ 사업개요

(단위 : 원)

사 업 명	시공업체	공사기간	계약금액	비 고
2016년 교통신호기 설치및보수공사(1구역)	㈜스타엘브이에스 대표 이준수	2016.3.15 ~ 2016.12.31	384,276,850	공정률 70%
2016년 교통신호기 설치및보수공사(2구역)	㈜벧엘정보통신 대표 채수진	2016.3.15 ~ 2016.12.31	385,307,000	공정률 70%
2016년 교통신호기 신설및개량공사(통합)	한국전기개발공사 대표 이승호	2016.3.15 ~ 2016.12.31	338,773,370	공정률 30%
2016년 교통신호등주 관급자재(1구역)구매	신한교통 대표 이종선	2016.3.21 ~ 2016.11.30	131,705,140	공정률 80%
2016년 교통신호등주 관급자재(2구역)구매	㈜신명이에스티 대표 신종순	2016.4.25 ~ 2016.11.30	134,632,350	공정률 40%

□ 예산 현황(2016.6.29 현재)

○ 예산(재)배정금액 : 2,482,384,000원

- 기   배정금액 : 1,779,684,000원

- 추가 배정금액 :   702,700,000원

□ 교통신호기 예산 집행 현황

(단위 : 천원)

구 분		예산배정액 (A)	계약금액 (B)	집행잔액 (C)=A-B	품의가능예산 (집행잔액)	비고
총 액		1,779,684	1,576,259	203,425	203,425
1구역 (종로, 강북, 성북)	도급비	440,000	384,277	55,723	55,723
	이전비	10,000	10,000	-	-
	총공사비	450,000	394,277	55,723	55,723
2구역 (도봉, 노원)	도급비	440,000	385,307	54,693	54,693
	이전비	10,000	6,250	3,750	3,750
	총공사비	450,000	391,557	58,443	58,443
통합 (5개구)	도급비	390,000	338,773	51,227	51,227
	이전비	-	-	-	-
	총공사비	390,000	338,773	51,227	51,227
교통신호등주 관급(1구역)	재료비	150,000	131,705	18,295	18,295
교통신호등주 관급(2구역)	재료비	150,000	134,632	15,368	15,368
기타 관급자재	신호제어기 교통신호등	189,684	185,315	4,369	4,369

□ 추가배정 예산 사용계획 검토

◎ 교통신호기 공사(연간단가-1,2구역,통합) : 600백만원

- 교통안전시설 규제 처리, 노후신호제어기 및 신호등주 교체, 음향신호기

신설 및 교체, 주야간 민원처리 등 긴급보수 시행

- 교통사업특별회계연도가 금년 12월로 종료되므로 도로굴착을 위한 현장조사,       도로공사신고 및 굴착신청, 유관기관협의, 기타 등 신속한 사업임무 완수를       위하여 현재 계약된 연간단가 공사에 설계변경하여 추진함이 타당(증액)

○ 교통신호기 설치 및 보수공사(1구역) : 250백만원

○ 교통신호기 설치 및 보수공사(2구역) : 250백만원

○ 교통신호기 신설 및 개량공사(통합) : 100백만원

◎ 관급자재 구매(조달) : 62백만원

○ 교통신호제어기 : 50백만원

○ 교통신호등(보행등, 잔여시간표시기, 기타) : 12백만원

◎ 교통신호등주 관급자재 구매(1,2구역) : 40백만원

○ 교통신호등주 관급자재(1구역) ：20백만원

○ 교통신호등주 관급자재(2구역) ：20백만원

□ 설계변경 계획

(단위 : 원)

공 사 명	구 분	총 공사비		증・감	비고
		변경(전)	변경(후)
총 액		1,128,357,220	1,728,357,220	(증)600,000,000
1구역 (종로,강북,성북)	도 급 비	384,276,850	634,276,850	(증) 250,000,000
	이 전 비	10,000,000	10,000,000	-
	총공사비	394,276,850	644,276,850	(증) 250,000,000
2구역 (도봉,노원)	도 급 비	385,307,000	635,307,000	(증) 250,000,000
	이 전 비	10,000,000	10,000,000	-
	총공사비	395,307,000	645,307,000	(증) 250,000,000
통합 (5개구)	도급비	338,773,370	438,773,370	(증) 100,000,000
	총공사비	338,773,370	438,773,370	(증) 100,000,000

‣ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기신설및보수

시설비(401-01)

□ 보고자 조치의견

○ 현재 교통신호기 설치 및 보수공사(1, 2구역)의 도급비 잔액 상당부분이 집행되어 추가배정된 예산을 활용하여 공사비 확보가 필요함.

○ 교통신호기 신설 및 개량공사(통합)의 대상지점의 실시설계금액이 계약된 도급비를 초과하여 추가배정된 예산을 활용하여 공사비 확보가 필요함.

○ 교통신호기 신설 및 보수예산 추가배정에 따른 교통신호등주 관급자재

재료비 추가 확보가 필요함.

붙임 : 1. 교통신호기예산 추가배정(교통운영과) 1부.  끝.