문서번호	정수시설과-2323
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김동우		김긍채	07/29 박기석
협 조

2계열 응집침전진 벽체 및 트라프 보수공사

트라프 추가 정비계획

2016.  7.

강북아리수정수센터

정수시설과

2계열 응집침전진 벽체 및 트라프 보수공사

트리프 추가 정비계획

연차적 사업인『2계열 응집 침전지 벽체 및 트라프 보수공사』의 미집행 예산과 보험료 감액비를 활용하여 2계열 6지 트라프를 추가 정비하여 효율적으로 보수공사를 집행하고자 함.

1		현황

☐ 응집침전지 보수현황(금년 보수 : 2계열 4,5,6지)

지	소계		1계열		2계열		3계열		4계열
	보수	미보수	보수	미보수	보수	미보수	보수	미보수	보수	미보수
소계	12	12	0	6	6	0	6	0	0	6
1	2	2		1	1		1			1
2	2	2		1	1		1			1
3	2	2		1	1		1			1
4	2	2		1	1		1			1
5	2	2		1	1		1			1
6	2	2		1	1		1			1
정비년도				2017~8	2015~6		2013~5			2019

○ 보수 위치(금년도 공사완료 후)

: 미정비

: 정비완료

4계열

3계열

2계열

1계열

☐ 2016년 응집침전지 보수

○ 공 사 명 : 2계열 응집 침전지 벽체 및 트라프 보수공사

○ 공사기간 : 2016. 5. 20. ~ 12. 5.

○ 계약업체 : 지엘기술(주) 대표 윤인구

○ 계약금액 : 753,971,800원

○ 공사개요 : 침전지 3, 응집지 4, 트라프 2개소

구 분	소계	2-4	2-5	2-6	1-1
소계	9	3	3	2	1
침전지	3	1	1	1
응집지	4	1	1	1	1
트라프	2	1	1

☐ 2016년 응집침전지 보수 예산집행

(단위 : 천원)

편성예산	설계심사			예산집행
	요청	심사	차액	발주	낙찰	차액
880,000	880,000	873,980	6,020	873,980	753,972	120,008

2		정비내용

☐ 추가 정비 내용

○ 정비대상 : 침전지 2계열 6지의 트라프 (추가비용 : 약14,841천원)

- 정비 물량 변경

구 분		침전지	응집지	트라프
당초	수량	3개지	4개지	2개지
	위치	2계열 4,5,6지	2계열 4,5,6지 1계열 1지	2계열 4,5지
변경	수량	3개지	4개지	3개지
	위치	2계열 4,5,6지	2계열 4,5,6지 1계열 1지	2계열 4,5,6지

○ 정비 필요성

- 금년도 2계열 6지를 트라프를 제외한 침전지, 응집지 정비하는데, 추후 트라프 정비시 다시 1개월 생산중단 수반됨

- 생산시설의 효율적 관리를 위해 2계열 6지의 침전지, 응집지 정비와 함께 트라프 정비가 필요함

- 설계변경 감액비용으로 사전 정비함으로서 불용예산의 감소

○ 정비방법 : 시행중인 공사에 트라프 정비를 추가 지시하고, 추후 설계변경하여 정산처리(계약금액내 정산가능)

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

○ 예산확보 : 집행잔액과 설계변경 감액 비용으로 충당(14,815천원)

소 계 (천원)	집행잔액 (천원)	설계변경 감액(천원)
		건강보험료	연금보험료	노인장기보험료
14,815	6,020	3,476	5,091	228

- 금년에도 보험료 외 퇴직공제부금의 감액을 계약업체에 확인

- 또한, 낙찰 차액 120백만원의 예산을 사용할 수 있어 예산이 확보됨.

※ 낙찰차액을 활용한 과도한 추가정비는 도급비 증액으로 별도 발주 하여야 하고, 불용액 감소를 위해 낙찰차액 사용은 적정한 예산운용이 안 됨(본부 기획예산과 확인).

3		정비 효과

○ 생산시설의 효율적 운영으로 안전한 수질확보

○ 관람객에게 깨끗한 이미지 제공

○ 시설물의 효율적 정비로 불용예산 감소

따로붙임 : 트라프 1지 정비비용(계약금액 기준)   1부.   끝.