문서번호	물재생계획과-2925
결재일자	2016.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	하수계획팀장	물재생계획과장
김상훈	김준형	03/04 하상문

「반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계」

유역 경계조정사업 시행(안) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3

물생계획과

반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계』

유역경계조정 사업 시행(안) 검토 보고

강남역 일대 침수 해소를 위해 단기대책으로 마련한 유역 경계조정 사업에 대하여, 계약심사가 완료됨에 따라 예산 재배정 등 전반적 사항을 검토 후 추진계획을 보고 드림

☐ 추진근거

❍ 강남역 일대 침수 해소를 위한 배수개선대책 추진계획

(하천관리과-2158 2015.2.10.)

☐ 사업개요

❍ 반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계용역

- 용 역 명 : 반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계용역

- 용역기간 : 2015.9.25. ~ 2016.9.23.

- 용 역 비 : 1.608백만원

- 과업내용

▸ 역경사 관로개선(▣1.5m×1.5m@3, L=36m→2.0m×3.0m, L=66m)

▸ 유역경계조정  13.2ha

▸ 유역분리터널(D=7.5m,  L=1.3km)

☐ 추진경위

❍ ‘13.3.4 ∼ ’15.2.20 :『강남역일대 배수개선대책 검토 기본 및 실시설계』용역추진

- 용역결과 : 하수도 배수구역 경계조정 등(단기) + 유역분리터널(중기)

※ 용역주관사 파산으로 기본계획 수립 후 용역준공

❍ ‘15. 9.25 : 반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계용역 계약

❍ ‘15.10. 7 : 용역 착수보고

❍ ‘15.10. 7 ∼ 현재  : 용역설계 진행중

【추진실적】

- 터널유입부 공사시행 의뢰(서초구청 ‘16.3.2)

· 총공사비 : 4,814백만원

· 사업규모 : □ 5.0×6.0(B×L), L=120m

- 배수경계구역 조정 우선시공분 1차분 공사착공(‘16.1.27)

-  2차분 계약심사 완료(2016.3.3.)

▶ 계약심사 결과

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	1차배정	심사요청액	심사금액	조정액	비고
강남역일대 침수방지	4,000,000	1,500,000	335,850	327,778	감)28,072	조정율 7.9%

※ 조정 총공사비 : 553백만원(도급비 328, 관급비 137 이전비 88)

☐ 검토의견

❍ 강남역 일대 침수피해 해소를 위하여 조속한 추진이 필요

❍ 사업추진 방법

- 공사추진 : 서초구청 시행

- 발주방법 : 배수경계구역 조정 우선시공을 위하여 기 도급 계약되어 시행중인 업체에 설계변경 공사 추진

· 우기전 공사완료의 시급성과, 공사장이 인접되어 동일업체 시공이 공사장관리에 유리함

- 사업기간 : 착공일로부터 120일

- 예산배정 : 서초구 요청에 따라 예산 재배정

☐ 향후계획

❍ ‘16.3월 : 예산요청(서초구)

❍ ‘16.3월∼ 7월 : 공사착공 및 준공

☐ 행정사항

❍ 침수피해 예방을 위하여 우기전 공사완료에 전력을 기울여 주시기 바람

※ 예산과목 : 물순환안전국 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 강남역일대 침수방지