문서번호	정수시설과-923
결재일자	2016.4.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이상훈		김긍채	04/01 박기석
협 조
	주무관			김동우

4계열 침전지 중앙분리벽 제작구매설치 계획

2016. 3

강북아리수정수센터

정  수  시  설  과

4계열 침전지 중앙분리벽 제작구매설치 계획

강북아리수정수센터                                       -  -                                  정수시설과

4계열 침전지에 분리벽을 설치하여 침전지 장폭비를 개선함으로서 수온변화에 의한 밀도류 및 단락류 발생을 최소화 하고 수류상태의 안정성을 증대하여 침전효율 향상하고자 함.

Ⅰ				추진 근거

운영과-12(2007.08.10)호 『침전지 분리벽 설치공사』 방침

운영과-4586(2010.07.23)호 『침전지 중간분리벽 효율 평가』 결과

- 침전수 수류흐름 및 수질의 안정성이 증대되어 연차적으로 중간 분리벽 설치 필요

강북정수장 기술진단보고서(2006년)에서 분리벽 설치 권장

- 우리 정수센터 4계열 침전지 장폭비(W:H)  1 : 3.1   ➫ 설치 후 1 : 6.2

※ 「상수도시설기준(2010년)」 장폭비(W:H)  1 : 3～8

「정수시설 종합설계와 유지관리」 (저자 Kawamura) 장폭비(W:H)  최저 1 : 4 이상

Ⅱ				침전지 현황 및 중앙분리벽 설치추진경과

침전지 현황

구분	규 격 (L×W×H)	지별 총용적	지수	2016년 설치 예정 침전지
4계열 침전지	20×62.4×5m	6,240㎥	6지	4개지

설치 경과

년도	2008	2010	2011	2012	2015	2016	비고
설치 갯수	3계열 4개지	3계열 2개지	2계열 6개지	1계열 6개지	4계열 2개지	4계열 4개지 예정	24개지 중 20개지 기완료

분리벽 설치전	자재 하역 작업	분리벽 설치 작업중	분리벽 설치 완료

Ⅲ				사업 개요

사 업 명	: 4계열 침전지 중앙분리벽 제작구매설치

사업기간	: 착공일로부터 150일

예 산 액	: 300,000천원

설계금액	: 300,000천원

예산과목	: 자본적지출-유형자산취득-기계장치-시설및부대비(시설비)

사업내용	: 침전지분리벽 설치 4지, 851㎡ (HDPE 판넬, t=65㎜)

Ⅳ				계약 방법

발주방법

- 특정제품심사위원회 개최 후 심의결과에 따라 본부 계약심사 후 조달계약 요청

Ⅴ				추진 일정

‘16.4.6 : 특정제품선정심사위원회를 개최하여 자체 타당성 심사

- 심사 대상 : 특정 제품 및 공법(특허 10********호)

‘16.4.7 : 심사위원회 결과에 따라 설계에 반영

‘16.4.9 : 본부 설계심사 후, 조달계약 요청

붙임문서	:    설계내역서 및 도면 1부.  끝