투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 서울대공원 등산로 정비공사 준공기한 연기 시행

공사 시행 중인  『2016년 서울대공원 등산로 정비공사』의 준공기한 연기를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 서울대공원 등산로 정비공사

나. 공사내용 : 휴게공간조성, 노면정비, 축대목, 배수로 정비, 노후시설 철거

다. 공사기간 : 2016. 04. 18 ~ 2016. 5. 27

라. 도 급 액 : 금170,643,390원(금일억칠천육십사만삼천삼백구십원)

마. 도 급 사 :포천시산림조합 대표 남궁 종

바. 내역변경 : 해당없음

사. 준공기한 연기 : 2016. 6. 16일까지 (연기사유서 별첨)

붙임  1. 준공기한 연기서 1부       2. 검토보고서 1부(별첨).  끝.

주무관							김규희				주무관					김흔진					조경과장					전결 05/27 代강금완
협조자
시행			조경과-2748										(						)		접수												(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102																/			http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		02-500-7541							/전송			02-500-7993					/														/	대시민공개