문서번호	방재시설부-11731
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
정호운		이도헌	07/26 代이도헌
협조

엘리베이터 진입로 벽체 마감공사에 대한 검토 보고

(경춘철교 정비공사)

2016. 7

도시기반시설본부

방재시설부

엘리베이터 진입로 벽체 마감공사에 대한 검토 보고

경춘철교 정비공사와 관련하여 엘리베이터 진입로 벽체 마감공사에 대한 책임건설사업관리기술자로부터 실정보고 사항이 통보되어 이에 대한 검토 보고임.

사업개요

❍ 공 사 명 : 경춘철교 정비공사

❍ 위    치 : 노원구 월계동 224-3번지 일대

❍ 규    모 : 경춘철교(L=176.5m, B=3m) 보수보강, 시설물 설치

❍ 기    간 : 2015. 1. ~ 2016. 7. 30.

❍ 도 급 비 : 4,461백만원

❍ 시 공 사 : 대흥토건㈜

❍ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링 종합건축사무소

실정보고 내용

❍ 엘리베이터 진입로 벽체 마감 변경

- 엘리베이터 진입로 벽체에 대하여는 노출콘크리트로 변경하여 시공 예정이었으나, 주위환경과의 조화 및 원활한 유지관리를 위해 드라이비트 시공으로 변경하고자 함.

공사비 검토

(단위 : 원)

구 분	규 격	단위	수량			금액(직접시공비/원)			비고
			당초	변경	증감	당초	변경	증감
드라이비트 도장		m2	-	115.33	증)115.33	-	3,167,591	증)3,167,591
직접공사비 계			-	-	-	-	3,167,591	증)3,167,591
간접공사비 계		식	-	-	-	-	1,558,748	증)1,558,748
공사비 계		식	-	-	-	-	4,726,339	증)4,726,339

책임건설사업관리기술자 검토내용

❍ 상기와 같이 경춘철교 정비공사 중 엘리베이터 진입로 내‧외부 벽체 및 하부 개구부 드라이비트 시공 변경과 관련하여,

❍ 엘리베이터 벽체 마감 중 노출콘크리트의 마감은 불규칙한 면과 외부       주위환경과의 조화가 이루어지지 않아 이에 드라이비트 시공후 고궁갈색   으로 도장하여 마감하는 것이 공사비 절감 및 주위환경과의 조화를 위해   변경함이 타당하다고 사료됨.

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 책임건설사업기술자의 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되므로 승인조치하고자 함.

붙임 : 1) 책임건설사업관리기술자 검토의견 1부.  끝.