문서번호	기전과-5910
결재일자	2016.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장
이명호	신대중	07/28 박심근
협 조

『2016년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

감리 실정보고 검토보고(2차 작업지시)

2016. 7

성동도로사업소

(기 전 과)

『2016년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

감리 실정보고 검토보고(2차 작업지시)

2016년 교통안전표지 유지보수공사 중 2차 작업지시 보류요청과 관련 감리 실정보고가 접수되어 관련 서류 및 현장 확인 후 그 결과를 보고합니다.

▣ 관련근거

○ ㈜트래픽스 TR-5-0716(2016.07.26)

- 2차 작업지시 규제 2번 보류에 따른 실정보고

▣ 공사개요

공 사 명	2016년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)
도 급 자	주식회사 그로우건설 대표 심현보
도 급 비	금57,479,600원
공사기간	2016.03.22 ~2016.12.31
감 리 원	㈜트래픽스 김기영

▣ 감리원 검토의견

○ 검토내용

구 분	당초 작업내역	변 경 내 용	변 경 사 유
2차 작업지시 규제 2번	동대문구 레미안크레시티 아파트 앞 유턴 신설	동대문구 레미안크레시티 아파트 앞 유턴신설 취소	- U턴 신설 공사 보류요청 동대문구 교통행정과-9497 (2016.04.15.)

▣ 보고자 의견

○ 해당 공사현장(동대문구 답십리동 답십리로 90-1 레미안크레시티 아파트 앞) 버스정류장 원래위치로 재설치 관련 U턴 신설 보류요청이 있어 유턴신설을 취소하여,

○ 교통안전표지 유지보수공사–2차 작업지시 공사추진에 철저을 기하고자 합니다.

붙     임 : 감리실정보고 1부. 끝.