문서번호	기전과-5977
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		07/29 박심근
협 조
	주무관		이명호

『교통신호기 유지보수공사(신설및개량)』

제2차 작업지시 공기연장 실정보고 검토보고

2016. 7.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통신호기 유지보수공사(신설및개량)』

제2차 작업지시 공기연장 실정보고 검토보고

교통신호기 유지보수공사(신설및개량)의 제2차 작업지시 건에 대하여 공기연장 실정보고가 접수되어 검토하여 보고드림.

Ⅰ

관 련 근 거

○ 기전과-3598(2016.05.12.)호 ‘2차 작업지시’

○ ㈜건영이앤시 건영 본16-07-11호(2016.07.20.)

Ⅱ

공 사 개 요

○ 공 사 명 : 교통신호기 유지보수공사(신설및개량) 2차작업지시

○ 계약자 : ㈜거승이엔씨 대표 김주완

○ 작업기간 : 2016. 05. 12. ∼ 2016. 07. 30.

Ⅲ

실정보고 현황

○ 보고내용

장 소	당 초	변 경	변경사유
이경시장	2016.05.12. ∼2016.07.30.	2016.05.12. ∼2016.08.30	해당 구청의 굴착허가 지연으로 인하여 공기연장이 필요함

○ 보고자 : ㈜건영이앤시 조 순재 감리원

Ⅳ

검 토 결 과

○ 교통신호기 유지보수 2차 작업지시의 공사기간 변경요청에 대한 실정보고를 검토한 결과 해당구청의 굴착허가 지연으로 인하여 상기 작업지시에 대한 작업기간 변경을 승인하고자 합니다.

첨  부 : 공기연장 실정보고(신설및개량) 1부.  끝.