문서번호	설비부-12093
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이호기		여인웅	07/29 권오식
협조

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

기존분뇨처리시설 준설공사 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

도시기반시설본부

설 비 부

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

기존분뇨처리시설 준설공사 설계변경 검토 보고

「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」과 관련하여 감리단이 제출한 기존분뇨처리시설 준설공사 실정보고 사항에 대한 검토 보고임

1		공사개요

▢ 공 사 명 :『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

▢ 공사규모 : 분뇨처리시설 4,000㎥/일, 기존시설 철거 및 상부공원화

▢ 사 업 비 : 금73,200백만원(도급비 63,516백만원)

▢ 공사기간 : 2012.11.15. ~ 2016.10.25

▢ 시 공 사 : 대림산업(주) 외2

▢ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1

2		관련근거

▢ 서분감 제2016-315(2016.7.28.) 기존분뇨처리시설 준설공사 실정보고

3		설계변경 내용

▢ 변경금액 및 사유                                 (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	사 유	비고
재 료 비	-	-	-	-
노 무 비	-	-	-	-
경 비	-	78,000	78,000	기존처리장 분뇨 준설 설계서 누락
환경보전비	-	390	390
순공사원가	-	78,390	78,390	〃
일반관리비	-	3,528	3,528	〃
이 윤	-	8,192	8,192	〃
총 원 가	-	90,110	90,110	〃
부가가치세	-	9,010	9,010	〃
총도급액	-	99,120	99,120	〃

※ 설계시공 일괄입찰공사로 총공사 계약금액 증액없이 조정시행

<관련규정>

○ 공사계약 일반조건

- 제19조(설계변경 등) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락․오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

- 제19조의2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경) 제1항, 제2호, 계약목적물의 기능 및 안전을 확보할 수 있도록 설계서 보완

- 제21조(설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한 등) 제1항 제2호 일괄입찰 방법으로 체결된 공사계약은 설계변경으로 계약내용을 변경하는 경우에도 정부의 책임있는 사유 또는 천재․지변 등 불가항력의 사유로 인한 경우를 제외하고는 그 계약금액을 증액할 수 없다

4		보고자 의견

○ 감리단 검토의견

- 설계서의 내용이 누락·오류 및 설계서간 상호모순 등에 의한 사항은 공사계약 일반조건 제19조, 제19조의2 규정에 의거 설계변경 및 보완이 가능하고, 제21조 규정에 의거 총공사 계약금액 증액없이 조정하여

- 기존처리장 구조물내에 적체되어 있는 분뇨슬러지를 준설하여 구조물 철거시 악취

발생을 최소화하는 것이 타당하다고 사료됨

○ 보고자 의견

기존분뇨처리장 철거에 따른 분뇨준설이 설계누락된 사항으로 공사계약 일반조건    등 관련규정에 부합하므로 책임감리단 검토 의견대로 총공사 계약금액 증액

없이 설계변경 실정보고 승인코져 합니다.

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부. 끝.