문서번호	방재시설부-11996
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
송민영		이도헌	07/29 代이도헌
협조

사토 운반거리 변경 검토보고

- 탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사 -

2016. 07.

도시기반시설본부

방재시설부

타워크레인 기초C 존치 관련 검토보고

- 탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사 -

당초 타워크레인 공사완료 후 제거 예정인 기초C에 대하여 ㈜탄천환경에서 재활용 계획이 있어 타워크레인 기초C 존치에 따른 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

◦ 탄천감 16-190(2016.7.29) : 타워크레인 기초C 존치관련 실정보고

Ⅱ		공사개요

◦ 공 사 명 : 탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사

◦ 규    모 : 복개 구조물 A=33,978㎡, 공원 조성 1식

◦ 사업기간 : ′13.10.1. ~ ′16.9.29.(4차: ′16.3.6 ~ ′16.9.29)

◦ 도 급 비 : 26,195백만원(4차 6,123백만원)

◦ 시공사/감리사 : 웅진개발 외1 / ㈜유신 외 1

Ⅲ		현 황

□ 타워크레인 기초 설치현황

구 분	규 격	수량	철거/존치	비 고
타워크레인 기초A	7.0×15.0×2.5	1	철거
타워크레인 기초B	6.8×12.0×3.2	1	철거
타워크레인 기초C	7.0×15.0×2.5	1	철거
타워크레인 기초D	5.2×15.0×2.5	1	철거

□ 보고내용

◦ 탄천물재생센터 유지관리업체인 ㈜탄천환경에서 타워크레인 기초를 향후 전망대 기초 등으로 재활용 계획으로 있어 존치를 요구하고 있음.

- 타워크레인 존치에 따른 폐기물처리비 감액 예정

Ⅳ		검토의견

□ 책임감리 검토의견

◦ ㈜탄천환경 요구에 의한 타워크레인 기초C 시설물의 재활용 및 이에 따른 공사비 절감 등의 효과로변경함이 타당함.

◦ 타워크레인 기초C 존치에 따른 계약금액 변경적용은 타당하다고 사료되어 추후 설계변경시 반영코자 함.

◦ 공사비 변경현황

구 분	금 액		증, 감	비 고
	당 초	변 경
공사비	404,690천원	271,810천원	감) 132,880천원

Ⅴ		조치의견

◦ 책임감리원 보고내용을 검토한바 타당하다고 판단되어 타워크레인 기초C를 존치하고 추후 설게변경시 정산하는 조건으로 승인하여 공정 관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 감리 실정 보고서. 1부.   끝.