문서번호	급수운영과-14556
결재일자	2016.8.1.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백창진	임인택	08/01 전명수
협 조

급수공사 연기 보고(신설-50)

명에 의거 마천동 외 14개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 공사 현황

○ 공 사 명 : 2016년 마천동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 계약기간 : 2016.6.23. ~ 2017.6.30.

○ 계약상대자 : *************

○ 급수공사 기한 연기 내역

지시번호	공사위치	공사개요	기존 공사기간	공사연기기간	연기사유
신설-50	********	구경 80㎜, 연장 2m	7.23.~8.2.	7.23.~8.31.	수요가 요청 (신축공사지연)

2. 지체상금 부과여부 : 급수공사 수요가 요청으로 인한 급수공사 연기건이므로 지체상금 미부과하고자 함.

3. 조치내용

- 상기와 같이 수요가의 급수공사일정 연기 요청에 따라 변경된 공사 기간을 *****************통보하고자 합니다.  끝.