문서번호	환경보전과-536
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
김찬우	이재덕	박웅빈	02/18 신시섭
협 조

2014년 매립가스 처리시설 연간운영계획

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2014년 매립가스 처리시설 연간운영계획

한국지역난방공사에서 제출한 2014년도 매립가스처리시설 연간운영계획서에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 아래와 같이 처리하고자 합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 난지도매립지 매립가스 처리시설 관리·운영에 관한 협약서 제6조

□ 2014년도 매립가스 처리시설 연간운영계획서 승인요청

(마포지사 운영1부-134. 2014.1.24.)

Ⅱ		위 탁 현 황

1) 위탁기간 : 2014.2.1.~2017.1.31.

2) 수탁기관 : 한국지역난방공사(마포지사)

3) 운영인원 : 11인

4) 위탁시설현황

- 매립가스 포집공 : 106공(제1매립지 58공, 제2매립지 48공)

- 이송관로 : 14.1㎞(D=100～450mm)

-  송풍기 : 115㎥/분×1대,  40㎥/분×1대

- 정제시설 : 460㎥/분×2대

- 소각기 : 115㎥/분×2대 등

Ⅲ		검 토 사 항

(단위 : 천원)

한국지역난방공사 승인요청 사업				사업소 승인계획
사업명	주요내용	시행 시기	소요 예산	승인 여부	내 용
기계분야 정기점검	스크러버,공기압축기 등 장기간 사용에 따른 분해점검	7~8	20,000	승인	장기사용에 따른 분해점검 필요
제어분야 정기점검	전송기 및 스위치류 정기점검 및 2012년 정기점검 문제점 보완	7~8	10,000	승인	정기점검 필요
이송관로 보온․보완공사	겨울철 잦은 결빙구간 및 파손부분 보온 보완 공사	9	25,000	승인	보완공사 필요 시행시기 6월조정
터보블러워 구매·설치	＃A블로워(500kw) 기동시 피크전력에 따른 요금 방지 및 피로도 누적에 따른 신규구매 -용량 (55kw) 구매예정	5	90,000	승인	신규구매 필요 시행시기 4월조정
경상보수 및 자재구매	긴급보수비용	수시	10,000	승인	긴급예비비 확보 필요
총 액			155,000

※ - 사업시행 시 공사건별 별도로 상세계획서 제출 보고, 승인 후 진행 예정

Ⅳ		행 정 사 항

□ 위탁업체 지도감독

1) 목    적 : 위탁업체 지도감독 철저로 위탁운영 내실화

2) 점검계획

- 점검일자 : 년 2회(5월, 11월) 및 필요시

- 점검내용

· 운영인력 자격, 안전교육이수 등

· 위탁운영비 정산비 적정 청구 및 관련자료 조사

· 안전사고 예방 및 대처방안 등 각종 문서관리 적정여부

· 가스처리시설 현장 관리실태 등 현장점검

· 매립가스 판매대금 우리시 수입에 대한 적정여부 등

붙   임 : 2014년도 연간운영계획서(한국지역난방공사) 1부.끝.