함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경시행(2016년 서부관내 포장도로 굴착복구공사)

우리사업소에서 시행중인 “2016년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행코자 합니다

가. 공 사 명 : 2016년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사

나. 계약기간 : 2016.05.20 ~ 2017.6.30

다. 계약상대자 : 라텍씨앤씨(주) 대표 박기춘

마. 설계변경사유 : 공사현장 여건변화 등으로 신규공종 발생 및 복구물량 증.감 에 따른 변경

바. 설계변경 내역

구 분	총 부 기 금 액		1 차 계 약 금 액
	당 초	변 경	당 초	변 경
총공사비	1,714,224,600	1,714,224,600	1,200,554,700	1,200,554,700
도 급 비	1,368,363,600	1,368,363,600	958,452,000	958,452,000
관 급 비	345,861,000	345,861,000	242,102,700	242,102,700

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 개조공사비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

재난시스템구축,소방용수시설관리,소방용수시설드의설치                             및 관리 소방용수시설보수,시설비 및 부대비

재난시스템구축,소방용수시설관리,소방용수시설드의설치                             및 관리 소방용수시설보수,시설비 및 부대비

따로붙임 : 1) 설계변경 심의위원회개최결과 및 설계변경 보고서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 합의서 1부.   끝.

주무관	전성호		급수설비팀장	김찬모		급수운영과장	代김찬모		서부수도사업소장	08/01 강홍기
협조자	주무관	윤정란
시행	급수운영과-18638	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화	3146-3673	/전송	3146-3689	/	jeonho32@seoul.go.kr	/	부분공개(7)