문서번호	토목부-2952
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
강철규		나상호	02/18 노우성
협조	터널건설과장		명경출
	주무관		이병환

신월지하차도 구조물 활용계획 보고

2014. 2.

도시기반시설본부

토  목  부

신월지하차도 구조물 활용계획 보고

[신월지하차도 평면화 기본 및 실시설계 용역]

「신월지하차도 평면화 사업」관련 `14.2.11 통보된 물재생계획과의 검토의견을 반영하여 “지하차도 구조물을 저류조로 활용”할 수 있도록 설계(변경)코자 함.

· 사유 : 하류지역의 하수관로 개선 계획수립이 필요하므로, 하수관로 개선시까지 지하차도 구조물을 저류조로 활용하고, 빗물유입시설 확충 필요

□ 사업개요

○  위    치 : 양천구 신월6동 신월지하차도(강월초교입구 교차로)

○  규    모 : 평면화 폭 30m, 연장 200m (지하차도 폐쇄 폭 2차로, 연장 182m)

- 하수 암거 설치 (□ 1.5m×1.5m, L= 155m)

○  사업기간 : 2012. 5 ~ 2014. 5 (설계: `13.2.7 ~ `14.2.28)

○  총사업비 : 2,500백만원 (설계 : 97백만원, 공사 등 2,388백만원)

○  설계용역사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

□ 추진현황

○ `12. 5. 4 : 타당성조사계획 수립(도시안전실장 방침)

○ `12. 5.29 ~ '12.11.30 : 타당성조사 및 기본계획 용역(도로계획과)

○ `12.11.26 : 사업추진계획 (도시안전실장 방침)

○ `13. 2. 7 : 설계용역 계약(`13.2.8 과업착수)

○ `13.10.22 : 설계자문(2차) 개최

- 지하차도 구조물을 임시저류조로 활용하는 방안검토(관련부서 협의)

○ `13.10. 1 : 주민설명회 개최(신월7동 주민센터)

○ `13.10. 8 : 임시저류조 활용방안 등 협의(물재생계획과)

- `13.10.24 : 공공하수관로변경 자문(검토)토록 회신됨

○ `13.11.15 : 공공하수관로변경 자문 요청(양천구 → 물재생계획과)

○ `14. 2.11 : 공공하수관로변경 자문결과 통보(물재생계획과→토목부)

□ 공공하수관로변경 자문결과 주요내용

○ 하류지역의 하수박스 용량이 부족하므로, 하류부에 대한 하수관로 개선계획 수립이 필요함(양천구에서 개선계획 수립)

○ 하류지역의 하수관로 개선시까지는 지하차도 구조물을 저류조로 활용

○ 지하차도 상류부(부천방향)의 빗물유입시설 확충 필요

□ 조치계획

○ 2013년 사업예산이 불용되지 않도록 당초 기본계획안(지하차도 폐쇄)으로 설계하여 공사 발주한 후, 공공하수관로변경 자문결과에 따라 사업 시행토록 방침 결정된 사항이므로(토목부-21925:`13.11.27)

○ 상기 자문결과를 반영하여 “신월지하차도 구조물을 저류조로 활용”하는 사항에 대하여 공공하수도관리청(양천구)과 협의하여 설계 보완코자 함(설계 완료 후 공사 설계변경 추진)

붙  임 : 관련문서 사본 1부.  끝.