투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	유인원관 망토원숭이 방사장 정비 공사기간 연장

1. 동물복지과 – 5512호(2013.11.12) 및 5947호(2013.12.12.)와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련 유인원관 망토원숭이 방사장 정비를 실시함에 있어 아래와 같이 공사기간을 연장 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건     명 : 유인원관 게이트 보완설치 공사

나. 변경내역

업 체 명	공 사 기 간		변 경 사 유	비 고
	당 초	변 경
㈜희원조경	2014. 2. 17 까지	2014. 2. 28 까지	기온이 급강화 함에 따라 바닥이 동결되어 기초공사 작업이 어려움

끝.

	동물복지과장
★주무관	차준호		동물복지과장	02/18 이달주
협조자
시행	동물복지과-759	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1)	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7741	/전송	02-500-7996	/	chadoli@hanmail.net	/	대시민공개