문서번호	시설과-522
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
박진우		홍순철	02/18 변규열
협조

「어린이대공원 놀이동산 재조성사업 전기공사」 실정보고(7회)에 따른 검토보고

동부공원녹지사업소

시설과

「어린이대공원 놀이동산 재조성사업 전기공사」

실정보고(7회)에 따른 검토보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 어린이대공원 놀이동산 재조성사업 전기공사

❍ 공사개요 : 옥외 보안등공사 1식,건축전기공사1식,

옥외 전기철거공사 1식

❍ 공사기간 : 2012. 12. 14 ~ 2014. 04. 30

❍ 도 급 액 : 194,874,000원(1차 91,541,000원 /2차 103,333,000원)

❍ 도 급 자 : 라온엘에스디(주) 대표 임순옥

실정보고 검토

❍ 실정보고 : 강북공사감독3처-1250(2014.02.17)

공 종	현황 및 문제점	검토의견 및 대책	개략금액 (순공사비, 천원)	비 고
1. 전력간선 설비공사	▷설계에 공원등 분전반 설치가 과학관옆에 설치토록 되어 있으나 유지관리업체에서 안전 및 미관을 고려 전기실 울타리내 설치 요청	▶공원등 분전반 설치 위치를 전기실 울타리내에 설치하고 설계변경 반영	(증) 228	회의록 (2.14)

검토의견

❍ 공단에서 제출한 실정보고 내용과 같이 안전 및 미관등을 고려하여

공원등 분전반을 전기실울타리안 으로 이전 설치하는 것이 타당하다고 판단되어 공사 시행하도록 승인하고, 추후 설계변경 처리하고자 함.

붙 임 : 실정보고 1부.  끝.