투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 소위원회 자문 의뢰(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

우리 부에서 시행중인 「남부순환로~오정대로간 도로개설공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경 소위원회 자문을 의뢰코자 합니다.

□ 설계변경 소위원회 자문 안건

연번	자문안건	공사비증감 (단위 천원)	비고
1	공기연장에 따른 추가발생 간접비에 대한 계약금액조정	- 당 초 : 0 - 변 경 : 995,000 - 증 감 : 증 995,000

붙  임 : 설계변경 소위원회 자문 요청서  1부.  끝.

★주무관	김상도		광역도로과장	진재섭		토목부장	08/01 代이동훈
협조자	주무관	남덕희
시행	토목부-15914	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	ironksd@seoul.go.kr	/	부분공개(5)