함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 PAC 600톤 조달구매 (2016-1차)건 납품기한 연기

1. 정수운영과-3458(2016.3.23.)호 관련 우리센터에서 구매한 응집제(PAC) 600톤의 납품기한을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

가. 구매건명 : 2016년 PAC 600톤 조달구매(1차)

나. 구매금액  : 금92,813,690원(금구천이백팔십일만삼천육백구십원)

※ 조달단가의 90% 제안 구매

다. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용,정수비,재료비,약품비, 생산재료비

라. 변경내역

약품명	수 량 (금액)	납품업체	납품기한		비고
			당초	변경
폴리염화알루미늄 (PAC 3종)	600톤 (92,813,690원)	금성이엔씨	2016.8.30.	2016.12.20.

마. 변경사유

상반기 : 응집제(PAC) 저장탱크 슬러지청소 및 시설 보수실시

하반기 : 약품관리동 응집제 보조탱크 및 주입설비 개량공사 진행으로

약품 사용중지

예정 입고일 : 공사완료 일정에 맞추어 입고실시.  끝.

주무관	정승경		정수운영과장	정선교		광암아리수정수센터소장	08/02 차윤기
협조자	주무관	代유혜영
시행	정수운영과-9977	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5342	/전송	3146-5309	/	jeask031@seoul.go.kr	/	대시민공개