투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선3단계 920공구 책임감리단
(경유)
제목	본선터널 비상콘센트 설계변경 실정보고 재검토 지시

1. 벽산(엔)제920감리-16-400호(2016.7.28)와 관련입니다.

2. 위호와 관련, 아래와 같이 재검토 지시하니 면밀히 검토하여 2016. 8. 12(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 재검토 사항

- 설계변경 근거 적용 오류

․ 공사계약일반조건 제19조 1항 및 제21조 6항(×)

→ 공사계약일반조건 제21조 1항 2호, 3항 2호, 4항 3호

․ 공사계약특수조건 제19조 1항(×)

→ 공사계약특수조건(Ⅰ) 제22조 1항, 특수조건(Ⅱ) 제19조 2항 3호 가목

- 단가조사서 미첨부(비상콘센트 자재단가 미검증)

- 물량산출, 공량산출 오류

․ 물량산출내역서는 계약도서가 아니므로, 당초 누락된 물량은 설계변경 증액 불가

․ 도면을 기준으로 감소된 물량만큼 감액처리

나. 기타사항 : 비상콘센트 도면과 자재시방은 2016. 8. 19까지 제출.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	황영필		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	08/02 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-8452	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개