문서번호	교통행정과-39402
결재일자	2016.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		교통시설팀장		교통행정과장		안전건설교통국장
김경원		방돈석		조덕현		08/02 代장완수
협조
	재무과장		김성철
	계약팀장		김종수

★ ◉

- 숭신·옥수초교 어린이 보호구역 -

신규 및 확대 지정사업 시행계획

2016. 8.

	성 동 구 (교통행정과)

- 숭신·옥수초교 어린이 보호구역 -

신규 및 확대 지정사업 시행계획

숭신 · 옥수초등학교의 인근 통학로를 어린이 보호구역으로 지정하고 교통안전 시설을 설치하여 어린이 교통사고 예방 및 안전한 통학로 환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

❍ 도로교통법 제12조(어린이보호구역의 지정 및 관리)

❍ 보호구역(어린이, 노인) 지정 통보[보행자전거과-8808(2016.06.23.)호]

Ⅱ		사업 개요

❍ 대    상: 숭신 · 옥수초등학교(2개소)

시설명	보호구역 지정 현황				비고
	도로명	시점	종정	연장거리
숭신학교	마장로	마장로 125	무학로 32	570m	신규
	마장로19길	마장로19길 29	마장로 141	310m
옥수초교	독서당로46길	금호로1길 29	독서당로46길 28	70m	확대

❍ 사업기간: 2016. 2. ~ 10.(8개월)

❍ 사업내용: 어린이 보호구역 교통안전시설(안전표지, 노면표시 등) 설치

안전표지	노면표시	속도표시

❍ 사 업 비: 40,580천 원(시비)

Ⅲ		추진 경위

❍ 2016. 2. 15.: 어린이 보호구역 지정 신청서 제출 요청

❍ 2016. 3.  9.: 어린이 보호구역 신규 및 확대 지정 요청(구→시)

❍ 2016. 3. 31.: 어린이 보호구역 지정 관련 기본 설계(안) 검토 요청

❍ 2016. 4. 12.: 어린이 보호구역 기본 설계(안) 학교, 경찰서 협의

❍ 2016. 5. 16.: 어린이 보호구역 지정 관련 검토의견 회신

❍ 2016. 5. 20.: 어린이 보호구역 도면작성 용역 시행

❍ 2016. 6. 23.: 보호구역(어린이, 노인) 지정 통보(시→구)

❍ 2016. 7. 28.: 어린이 보호구역 도면작성 용역 준공

Ⅳ		세부 추진계획

❍ 교통안전시설 설치개요

구 분	교통안전표지	노면표시	속도표시
숭신초등학교	22EA	3,270m	28EA
옥수초등학교	5EA	760m	3EA

❍ 사업 시행 방법

- 교통안전시설(안전표지, 노면표시) : 교통행정과 연간단가공사 작업지시

※ 방학 중 사업 완료를 위해 기계약된 연간단가업체 활용

- 속도표시: 조달 구매 설치

Ⅴ		향후 일정

❍ 2016. 8. 2.: 예산 재배정 요청[구 → 시(보행정책과)]

❍ 2016. 8. ~ 10.: 공사 시행 및 준공

Ⅵ		행정 사항

❍ 연간단가 계약 협조 ---------------------------------------------   재무과

붙임  위치도 및 개선도 1부.