보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이상욱	이경희	08/03 최철민

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여 급수공사 업무수행 중 급수공사 연기신청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

▢ 현  황

작업지시 번호	위 치	작업승인 공문	비 고
개량-63	신림동 1666-38외 1개소	급수운영과-16702(2016.07.19.)

▢ 보고 내용

○ 상기 공사건에 대하여 현장조사 후 소화전 보수 작업을 지시하였으나 재확인결과 신림동 500-12호 앞 지상식 소화전과 곡관부위를 교체가 필요함에 따라 도로굴착이 필요한 실정임

- 도로관리청 굴착 허가기간 필요

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 계획

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
개량-63	2016.07.20.~2016.08.02.	2016.07.02.~2016.08.19.

끝.