문서번호	건축부-10298
결재일자	2016.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		의료시설과장	건축부장
전재진		김충범	08/03 김진용
협조
	주무관		강철규

「서울시 어린이병원 삼성발달센터」

증축공사 공정회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

도시기반시설본부

건  축  부

「서울시 어린이병원 삼성발달센터」

증축공사 관련 공정회의 결과 보고

□ 사업개요

○ 대지위치 : 서초구 헌릉로 260

○ 규    모 : 지하2층/지상5층, 연면적 11,950㎡

○ 사 업 비 : 312억원 (시비 112억, 기부금 200억원)

○ 설 계 자 : 에이텍종합건축사사무소(주)

○ 감 리 자 : (주)영화키스톤

○ 시 공 자 : ㈜대자개발 외1

○ 공사기간 : ‘15.01.20 ～ ’17.02.19

□ 공정회의 개최

○ 일     시 : ‘16.8.3(수) 11:00~12:00

○ 장     소 : 어린이병원 현장 책임감리원 회의실

○ 안     건 : 부진공정 만회에 대한 실무회의

○ 참 석 자

- 감 리 자 : 감리단장 박찬주외 4인

- 시 공 자 : 현장대리인 강영규외 6인 등

- 도 기 본 : 건축부 전재진

□ 회의내용

○ 감리단장

- 공정만회에 최선을 다할 것

⇒ 11월중순 기계, 전기 장비반입에 따른 기계, 전기실 패드등 준비철저

⇒ 낙하물방지망 설치 준비 철저

⇒ 잔토에 대한 토사반출을 신속하게 조치할 것

⇒ 콘크리트 타설시 국지성 소나기에 철저히 할 것

⇒ 현장대리인은 현장 공정관리 및 안전사고 예방등에 철저를 기할 것.

○ 시공사

- 공정만회를 하도록 최선을 다하고 있음

⇒ 기계,전기실 패드는 공정에 지장이 없도록 조치하겠음

⇒ 낙하물 방지망은 다음주부터 준비하여 설치할 예정임

⇒ 잔토는 내일부터 반출하여 정리하겠음

⇒ 콘크리트 타설시 국지성 소나기에 대비하여 비닐등 준비 하겠음

○ 도시기반시설본부

- 레미콘, 데크플레이트 수급 및 우천등에 따른 공기연기 검토하고, 설계변경 사항과 내역조정등 준비할 것

- 하도급 감사에 따른 대금체불을 조속히 지급하고 종료할 것

- 7월 노임은 8월10일(수요일)까지 제출할 것

□ 다음주 계획

○ 매주 수요일 현장에서 공정회의에 참석하여 향후일정 등 업무협의. 끝.