문서번호	시설관리과-19280
결재일자	2016.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이무규	문용욱	08/03 이병운
협 조

『아리수음수대 설치 전기공사』

공사기간 연기 보고

2016.  8.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『아리수음수대 설치 전기공사』

공사기한 연기 보고

공원 아리수 음수대 설치공사와 관련 우리 사업소 관내 수명산근린공원 등 8개소에 아리수 음수대가 전기시설과 병행하여 설치할 예정으로 전기공급을 위한 공사를 발주하였으나, 공사기한(2016.8.13.)이 임박한 현재 음수대 설치 계약이 이루어져(납기 2016.11.26.)로서, 계약기한 내 전기공사가 불가능하여 본부에서 음수대 설치 후 전기공사 시행하고자 공사기한 연기를 보고 드림

Ⅰ		공사개요

❍ 사 업 명 : 아리수 음수대 설치 전기공사

❍ 사업기간 : 2016. 7. 14. ~ 2016. 8. 13.

❍ 사업내용 : 공원 음수대 전기 공급 및 콘센트 설치

❍ 사업대상 : 8개소 10대

연번	공원명	위 치	음수대 수량
1	수명산근린공원	강서구 내발산동 748	1
2	증미산둘레길	강서구 가양동 산 30-9	1
3	나들이어린이공원	강서구 가양동 1459-1	1
4	문화공원	강서구 가양동 1499	1
5	온수도시자연공원	구로구 온수동 산1-1	1
6	솔길어린이공원	구로구 구로동 391-1	1
7	덕의근린공원	구로구 고척동 339-4	1
8	해누리체육공원	양천구 신정동 330-4	3

❍ 계약금액 : 금7,415,000원

❍ 계약업체 : 주식회사 타임엔지니어링

Ⅱ		공사 추진상 문제점

❍ 아리수음수대 전기공사는 아리수음수대가 설치되고 전기 인입케이블 포설을 위한 도로굴착 후에 가능하므로 현재 상태에서 사업 추진이 불가능 함

❍ 본부 급수부(배수과)에서 발주한 공원 음수대 제작설치가 계약되어 8월 중순 ~ 10월 경 설치될 예정임

Ⅲ		조치계획

❍ 아리수음수대 제작 구매 계약기간을 감안하여 2016.11.26.까지 연장하고자 함

❍ 계약기간 연기 내역

사업명	계약기간		연기사유	귀책 사유	지연 배상금
	당초	변경
아리수음수대 설치 전기공사	2016.7.14. ~ 2016.8.13.	2016.7.14. ~ 2016.11.26..	공원 음수대 제작 구매 계약기간과 맞추어 공사기한 연기	발주처	없 음

Ⅳ		행정사항

❍ 해당 업체에게 준공기한 연장계약 통보 후 합의서 작성

❍ 행정지원과에 준공기한 연장계약 의뢰

따로붙임 : 계약체결 공문{공원 음수대(금속) 제작 구매(설치),본청 재무과-38089(2016.7.29.)} 1부.  끝.