서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	중랑 하수도과학관 전시안 현실화 행정처리 재촉구 및 향후 추진계획 통보

1. 건축부-10057(2016.7.29.)호 및 물재생시설과-8627(2016.6.20.)호와 관련입니다.

2. 중랑 하수도과학관 전시안 현실화 설계변경은 기 알려드린바와 같이 변경 설계도서 작성은 귀 본부의 계약상대자(GS건설) 책임하에 이루어짐에 따라 우리 시에서 전시설계 변경도서를 작성하여 귀 부서에 송부할 수 없음을 알아주시기 바랍니다.

3. 따라서, 사업의 원활한 추진을 위해 2016.6.2. 우리 시에서 귀 부서 방문 업무협의시 귀  부서(부서장)에서 전시계획 설계변경 작업지시를 약속하고 우리 시에 공문 요청한(2016.6.9. 공문시행) 사항대로 조속한 행정처리(변경 설계도서 접수 후 우리시 통보)를 하여 주시기 바라며,

4. 우리 시는 전시설계 변경도서를 제출받은 후 태스크포스팀, 총괄전시계획가 검토 및 전시계획, 설계변경 적정성 등에 대한 외부전문가 자문, 관련규정에 따른 기술심의 상정 등   제반절차를 이행(약 1개월이상 소요예상)할 예정임을 알려드립니다.

5. 또한, 중랑 하수도과학관 전시설계는 설계시공 일괄입찰방식에 의해 기 계약되어 집행되는 사업으로 별도로 분리하여 하수도과학관 전시안 현실화사업 추진은 불가한 사항임을 알려드리니, 붙임의 추진방안을 참고하시어 사업이 성공적으로 완수될 수 있도록 사업 주관부서로서 적극 협조하여   주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 작업지시 요청 공문(건축부 요청) 1부

2. 행정2부시장 보고회의 결과 추진방안 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	양해선		물재생시설팀장	이웅희		물재생시설과장	08/04 이철해
협조자
시행	물재생시설과-11267	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화	02)2133-3826	/전송	02)2133-1043	/		/	부분공개(6)