투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	SH공사사장
(경유)	전기공사부
제목	교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 기간연장 승인 통보(신정4 보금자리주택지구)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울특별시SH공사 전기공사부-2993(2016.08.01.)호와 관련입니다.

3.  위 호와 관련하여 『교통신호기 원인자부담공사 공사기간 연장요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신정4 보금자리주택지구 아파트 및 택지조성 전기공사

나. 공사장소 : 양천구 신정동 831번지 일원

다. 원 인 자 : 서울특별시SH공사 전기공사부

라. 감 리 사 : 대영유비텍㈜

마. 시 공 사 : (유)일석

바. 변경내용 및 요청 : 공사기간 변경에 따른 준공기한 연장

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	승인통지일 ~ 2016.08.01.	승인통지일 ~ 2016.08.31.	30일 증

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	장종창		기전과장	08/04 박재경
협조자	주무관	최승호
시행	기전과-10146	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/
전화	02-2657-7989	/전송	02-2657-7939	/	jcjang@seoul.go.kr	/	대시민공개