문서번호	기전과-8472
결재일자	2016.8.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	서부도로사업소장
윤석주	양영민	08/04 한동근

『원효대교 기전설비 이설공사 』

설계 변경 검토 보고

2016. 8.

서부도로사업소

(기전과)

『 원효대교 기전설비 이설공사 』

설계 변경 검토 보고

『  원효대교 기전설비 이설공사』분전반 한전 수전점 위치 변경 및 신규공종 발생으로 인한 물량 증.감이 발생하여 설계변경 시행코자 함.

□ 공사 현황

○ 공 사 명: 원효대교 기전설비 이설공사

○ 도 급 자: *****************

○ 공사금액: ********************************

○ 공사기간: 2016.3.15. ~ 2016.9.30.

○ 공사규모: 전선관(전선포함) 11개소 이설, 가로등주 2주이설

□ 설계 변경

○ 설계변경 사유 : 물량 증 · 감 및 신규 공종 추가

. 물량 증 · 감

- 수전점 변경으로 전선트레이 및 전선(11회로)물량 감소

- 수전점 변경으로 배관 및 인입선로(1회로) 변경설치

. 신규 공종

- 가로등{컷오프등기구 · 램프(CMH250W) · 안정기)}2등 교체

- 가로등{컷오프등기구 · 램프(CMH200W) · 안정기)}67등 교체

- 분전반 1면 교체

○ 설계변경 내용                                        (단위:만원)

공종	보고내용	조치내용	증감
계			-
분전반 위치변경 (트레이 및 전선)	현재 토공부에 설치되어 있는 분전반의 위치를 교량과 IC가 만나는 곳으로 옮겨 11회선을 1회선으로 변경 설치코자함	분전반 위치변경으로 당초 전선 11회선 (2C×11)를 1회선(4C)으로 변경시공 함에 따른 물량 감소로 감액	감 6,000
분전반	15년이 경과된 노후 분전반 교체 및 내부 먼지 유입 방지를 위해 위치 변경이 필요한 실정임	분전반 교체 및 위치 변경에 따른 물량 증가로 증액	증 1,500
가로등 (등기구,램프,안정기)교체	마포대교 등기구 및 램프, 안정기 노후로 교체 및 일부 개량 필요	노후 가로등(등기구,램프,안정기)67등 개량 및 원효대교 2등 교체에 따른 물량 증가로 증액	증 4,500

○ 설계변경(총괄)금액

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	(증,감)
총 공 사 비		122,599,520	122,599,520	-
도급비	공 급 가 액	111,454,109	111,454,109	-
	부가가치세	11,145,411	11,145,411	-
	계	122,599,520	122,599,520	-

○ 예산과목: 교량관리, 한강교량관리, 원효대교보수공사, 시설비

□ 보고자 의견(조치 계획)

○ 물량 증.감 및 신규공종 발생으로 설계변경을 시행하여 교량 유지관리에 철저를 기 하고자 함.

붙임 : 1. 설계변경(총괄)내역서 1부.

2. 원가 계산 검증확인서 1부.  끝.