투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 뚝섬한강공원 게이트볼장 개선공사 준공기한 연기 시행

1. 녹지관리과-3364(2016.8.4.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 “2016년 뚝섬한강공원 게이트볼장 개선공사” 시행과 관련하여 다음과 같이 준공기한 연기를 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 뚝섬한강공원 게이트볼장 개선공사

나. 위    치 : 뚝섬한강공원(광진구 자양동 427-22 일대)

다. 공사내용 : 게이트볼장 4면 정비

라. 도 급 자 : 자성조경 대표 김영환

마. 준공기한 연기

1) 당초 : 2016. 6. 20 ~ 2016. 8.  8

2) 변경 : 2016. 6. 20 ~ 2016. 8. 31(23일 연장)

바. 연기사유 : 민원사항에 따른 설계변경 사유 발생 및 하천점용허가 변경 등 절대공기 부족

사. 준공기한 연기에 따른 귀책소재 : 한강사업본부

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.

주무관	이재호		녹지관리과장	문경재		공원부장	전결 08/05 문길동
협조자	기획예산과장	김건태		총무과장	박병현
시행	녹지관리과-3375	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0836	/전송	02-3780-0745	/		/	부분공개(5)