문서번호	주차계획과-10584
결재일자	2016.8.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
금종융		전태호	08/05 윤보영
협조

망우본동 주택가 공동주차장 건설 (중랑구) 예산교부 검토

2016. 7.

도시교통본부

(주차계획과)

망우본동 주택가 공동주차장 건설 예산교부 검토

중랑구에서 추진중인『망우본동 주택가 공동주차장 건설사업』관련 ‘16년 예산편성된 주차장 사업비(시비) 교부 요청함에 따른 검토결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 중랑구 망우로62길 52-4 외 7 (A=1,324㎡)

○ 규    모 : 주차면수 102면 (지하1~지상2층, 연면적 3,054㎡)

○ 총사업비 : 4,270백만원 (시비 2,562, 구비 1,708)

구 분	총사업비	투 자 계 획			비고
		‘14	‘15	‘16
계	4,270	81	-	4,189
시 비	2,562	-	-	2,562
구 비	1,708	81	-	1,627

○ 사업기간 : ‘14.10 ~ ‘17.6

Ⅱ. 추진현황 및 향후계획

○ ‘13.12 : 부지매입 및 보상완료

○ ‘14.8~10 : 건설 타당성조사 용역

○ ‘14.10.13 : 망우본동 주택가 공동주차장 건설계획 수립

○ ‘14.10.31 : 시 투자심사

○ ‘15.3~10 : 기본 및 실시설계 용역

○ ‘16.4~5 : 건축,소방,전기,통신공사 발주

○ ‘16.4~5 : 건축,소방,건설폐기물 등 감리용역 발주

○ ‘16.5.19 : 건축공사 계약 (실공사 미착수)

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 망우본동 주택가 공동주차장 건설 시비예산 교부 요청

- 관련공문 : 2016년 주차장건설사업 시비보조금 배정요청

: 중랑구 교통지도과-13401호 (‘16.6.22)

□ 주차장 분야별 사업비                           (단위: 백만원)

구 분		사업비	시 비	구 비	발주시기	비고
계		4,270	2,562	1,708
보상비	보 상	-	-	-	-
설계용역	설계용역	81	-	81	‘14.12
공사발주	토목․건축	4,134	2,562	1,572	‘16.4
	전 기
	소방․전기
	통 신
	기 계
감리비	시공감리	55	-	55	‘16.4

□ 예산교부 검토(주차장건설)

○ 사업비 교부 현황(자치단체 자본보조, 단위: 백만원)

구 분	계	‘15년이전	‘16년			‘17년~	비고
			계	기교부	금회교부
계	4,270	81	4,189	-	4,189	-
시 비	2,562	-	2,562	-	2,562	-
구 비	1,708	81	1,627	-	1,627	-

□ 요청 사유

○ 공사비,용역비,감리비 등을 구비로 우선 투입하고 있으며, 금년도 시비 분담금 확보를 위해 예산 교부를 요청함

□ 검토 의견

○ ‘16 하반기 공사 시행에 필요한 시비 2,562백만원을 요청하는 사항으로

○ 자치구에서 공사계약(5.26.) 이후 현장사무실 설치 및 일부 작업 중에 있으며, 사업이 원활하게 이루어질 수 있도록 교부함이 타당하다고 사료됨

붙임   관련자료 1부.   끝.