문서번호	급수운영과-15775
결재일자	2016.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
황지웅		08/05 代이승우
협 조

준공기한 연기보고(개량6)

2016. 08.

강남수도사업소

(급수운영과)

준공기한 연기보고

1. 현    황

○ 공사위치 : 강남구 논현***************

○ 작업지시 : 개량 6

○ 공사개요 : 개량(밸브실 설치)

○ 공사기간 : 2016.07.19.~2016.07.31.

2. 보 고 내 용

○ 상기 위치는 여름철 장마와 무더위로 단수민원 과다로인해 주민설득후 본 공사건에 대하여 공사기간 연기를 요청한 사항임.

3. 조치의견

○ 상기 보고내용에 의거 현재 작업지시한 공사건에 대하여 아래와 같이 공사기간을 연기하고자 합니다.

․ 당초 : 2016.07.19.~2016.07.31.

․ 변경 : 2016.07.19.~2016.09.15.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.