	119특수구조단
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	환경개선 및 급수공사 실정 보고 검토요청 확인

1. 행정지원과-10527(2016.8.4.)호『환경개선 및 급수공사 실정 보고 검토요청』관련입니다.

2. 정화조 설치 승인을 7월 20일에 요청하였으나 국립공원 관리과의 담당 부재(휴가) 및 환경부의 담당 부재(휴가)로 요청이 지연됨을 확인하고 이로인해 관악산산악구조대 공사 허가승인이 7월 29일, 도봉산산악구조대는 현재도 허가승인이 떨어지지 않아 공사가 지연되었음을 확인.

3. 도봉산국립공원 정화조 설치 승인이 현재까지 떨어지지 않아 10일간 공사를 진행하지 못하였음을 확인.

4. 공사기간 지체에 따라 기존 준공일인 2016년 8월 8일에서 10일 후인 2016년 8월 18일로 공사연장이 필요하다고 사료됨.   끝.

	산악구조대장
담당자	박근형		1팀장	조성훈		산악구조대장	08/05 이재홍
협조자
시행	산악구조대-2986	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개