문서번호	교통행정과-39998
결재일자	2016.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		교통시설팀장		교통행정과장		안전건설교통국장
김경원		방돈석		조덕현		08/05 代장완수
협조
	재무과장		김성철
	계약팀장		김종수

★ ◉

- 2016년 시 주민참여예산사업 -

행당·옥수초교 스쿨존 개선사업 시행계획

2016. 8.

	성 동 구 (교통행정과)

- 2016년 시 주민참여예산사업 -

행당·옥수초교 스쿨존 개선사업 시행계획

행당·옥수초등학교 스쿨존 내 노후되고 파손된 도로 및 교통안전시설을 개선 하여 어린이 안전사고 예방 및 쾌적한 스쿨존 환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

❍ 도로교통법 제12조(어린이보호구역의 지정 및 관리)

❍ 행당·옥수초교 스쿨존 개선사업 추진계획[교통행정과-6961(2016.2.18.)]

Ⅱ		사업 개요

❍ 대    상: 행당 · 옥수초등학교(2개소)

❍ 사업기간: 2016. 2. ~ 10.(8개월)

❍ 사업내용: 어린이 보호구역 내 도로정비 및 교통안전시설 개선

- 안전표지, 노면표시, 유색포장, 과속방지시설, 방호울타리 정비

- 스쿨존 내 노후 · 파손된 도로 포장 정비

◎ 노후도로 정비현황

구분	행당초등학교	옥수초등학교	비고
공사구간	- 고산자로 194 ~ 고산자로8길 22	- 금호로3길 18 - 금호로1길 29 ~ 독서당로46길 28-9
공사내용	- 아스팔트 포장 정비 A=11.4a	- 보도신설 A=0.4a - 아스팔트 포장 정비 A=3.5a
소요예산	- 40백만 원	- 20백만 원
공사시기	- 2016. 8.: 현재 포장정비 중	- 2016. 6.: 포장 완료	토목과

※ 관련근거 : 행당·옥수초교 스쿨존 노후도로 정비계획[교통행정과-23881(2016.5.19)]

❍ 사 업 비: 170,000천 원(시 보조금)

Ⅲ		추진 경위

❍ 2016. 2. 18.: 사업추진 방침 수립

❍ 2016. 2. 23.: 사업예산(시 보조금) 교부

❍ 2016. 3. 2. ~ 3. 11: 행당․옥수초교 스쿨존 현장조사 시행

❍ 2016. 4. 15. ~ 4. 18.: 주민협의체 설명회(제1차) 개최 및 의견수렴

❍ 2016. 5. 19.: 스쿨존 노후도로 정비계획 수립

❍ 2016. 5. 20.: 어린이 보호구역 도면작성 용역 시행

❍ 2016. 6. 29.: 주민협의체 설명회(제2차) 개초 및 의견수렴

❍ 2016. 7. 28.: 어린이 보호구역 도면작성 용역 준공

Ⅳ		세부 추진계획

❍ 스쿨존 정비 개요

공 종	행당초등학교	옥수초등학교	비고
교통안전표지(매)	17	2
노면표시(m)	4,164	1,512
속도 표시(EA)	16	-
미끄럼방지 포장(㎡)	255	361
방호울타리(경간)	101	73

❍ 소요 예산: 110,000천 원(※도로포장 예산 제외)

(단위: 천원)

구분	계	교 통 안전표지	노면표시	속도표시	미끄럼방지	방호울타리
행당초교	67,307	9,466	8,134	4,943	9,325	35,439
옥수초교	42,693	735	3,217	-	13,127	25,614

❍ 사업 시행 방법

- 교통안전시설(안전표지, 노면표시): 교통행정과 연간단가공사 작업지시

※ 방학 중 사업 완료(주민협의체 의견)를 위해 기계약된 연간단가업체 활용

- 속도표시, 미끄럼방지포장, 방호울타리 정비: 조달 구매 설치

Ⅴ		향후 일정

❍ 2016. 8. ~ 10.: 공사 시행 및 준공

Ⅵ		행정 사항

❍ 연간단가 계약 협조 ---------------------------------------------------- 재무과

붙임  위치도 및 개선도 1부.