문서번호	교량보수과-979
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
김승진		02/18 안완순
협조

- 2013년 도로시설물보수공사 건설폐기물수집.운반 및 처리용역(강서) - 설계변경(최종)시행 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

교량보수과

『2013년 도로시설물보수공사 건설폐기물 수집.운반 및 처리용역(강서)』

설계변경(최종)시행 검토보고

2013년 예산사업으로 시행중인 『2013년 도로시설물보수공사건설폐기물 수집.운반 및 처리용역(강서)』에 관련하여 폐기물물량이 추가로 증․감되어 당초 계획물량과의 변동사항에 대한 설계변경(최종)시행 검토보고임.

용역개요

○ 용 역 명 : 2013년 도로시설물보수공사건설폐기물 수집.운반 및 처리용역(강서)

○ 용 역 사 : 용운환경(주) 외1개사 대표 박승민 외1명

○ 용역기간 : 2013.6.28 ~ 2014.02.28

○ 도 급 액 : 76,901,000원

○ 용역개요 : 폐기물운반 5,627톤, 폐기물처리 1,599톤

○ 추진공정 : 100%

설계변경 주요내용

공 종	단위	수 량			변 경 사 유
		당초	변경	증,감
폐콘크리트운반	톤	922	598	감)324	일상유지, 성산대교보수물량 감소
폐아스콘운반(주간)	톤	516	0	감)516	야간공사 시행으로 물량 감소
페아스콘운반(평삭)	톤	4,028	1,171	감)2,857	일상유지 등 보수물량 감소
혼합폐기물운반비	톤	161	0	감)161	일상유지 등 보수물량 감소
폐아스콘운반(주간)	톤	0	1,250	증)1,250	야간공사 시행으로 물량 증가(추가)
폐콘크리트처리비	톤	922	598	감)324	일상유지, 성산대교보수물량 감소
폐아스콘처리비	톤	516	1,250	증)734	염창교, 구일고가 보수물량 증가
페아스콘운반(평삭)	톤	4,028	1,171	감)2,857	일상유지 등 보수물량 감소
혼합폐기물처리비	톤	161	0	감)161	일상유지 등 보수물량 감소

용역비 변경내용

(단위:원)

구 분		용 역 비 변 경 내 용			비 고
		당 초	변 경	증, 감
총 용 역 비		76,901,000	55,000,000	감) 21,901,000
도급비	공급가액	69,910,000	50,000,000	감) 19,910,000
	부 가 세	6,991,000	5,000,000	감) 1,991,00
	도 급 비	76,901,000	55,000,000	감) 21,901,000

조치계획

○ 상기와 같이 변경수량 및 변경금액에 대하여는 설계변경시 정산처리하여 관련        업무에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 설계변경내역서(최종) 1부

2. 현장반출대장 1부.  끝.